	2020. 10. 23.(금) 11:00 제231회 임시회 제2차 본회의

- 2020년도 하반기 -

주요 사업장 방문 결과보고

	보령시의회

2020년 하반기 주요 사업장 방문 결과보고

코로나19로 인해 간소화하여 민생현장과 중점 현안사업 현장을

중심으로 방문하여 문제점을 파악하고 효율적인 대안을 제시함.

1

방 문 개 요

방문기간	2020. 10. 20.(화) ~ 10. 21.(수) / 2일
방문대상	주요 사업장 9개소
방문자	시의원, 의회사무국 직원, 집행부 관계 공무원 등
방문분야 선정	‣ 도시재생 뉴딜 사업 대응 시설 - 도시재생지원센터 운영 애로사항 등 ‣ 주요 사업장 공사 진행 상황 점검 - 대천-죽정동간 도시계획도로 개설 - 성주산 숲 하늘길 걷기 체험시설 등
주요일정	1. 주요 사업장 방문 대상지 협의: 정책협의회(9. 25.) 2. 방문일정 등 임시회 운영계획 협의: 운영위원회(10. 12.) 3. 주요 사업장 방문의 건 의결: 제1차 본회의(10. 14.) 4. 주요 사업장 방문: 10. 20.(화) ~ 10. 21.(수) 5. 주요 사업장 방문 결과보고서 채택: 제2차 본회의(10. 23.)

2020 하반기 주요 사업장 방문 대상지

[ 방문기간: 10. 20.(화) ~ 10. 21.(수) / 사업장 9개소 ]

연번	사 업 명	소재지	소관부서	비 고
◀ 1 일차 [북부 지역] ▶
1	쇗개포구 명소화 조성 (남대천 마을조성)	대천1동	도시재생과	·궁촌동 346번지 일원 ·60억원(도 30, 시 30) ·인도교설치, 역세권 경관개선
2	광장형 야외공연장 조성	대천2동	문화새마을과	·문화의 전당 내 ·사업비: 15억원(도5,시10) ·11월 중 완공 예정
3	도시재생지원센터	대천2동	도시재생과	·도시재생 사업 지원 ·운영비 34,600천원 ·상근 3명, 비상근 1명
4	대천-죽정동간 도시계획도로 개설	대천2동	도로과	·10월 착공(`22. 6. 준공) ·사업비: 158억원(시비) ·L=610m(터널 260m)
5	천북해상낚시터	천북면	해양정책과	·천북면 장은리 일원 ·사업비: 18억원(국5,도4,시9) ·12월 중 완공 예정
◀ 2 일차 [남부 지역] ▶
6	주산벚꽃 관광자원화 사업	주산면	관광과	·9월 준공 완료 ·사업비:10억원(도5,시5) ·데크로드 L=182m ·인도교, 경관조명
7	보령댐 데크시설 설치	미산면		·7월 착공(`21. 6.준공) ·사업비: 18억원(도9,시9) ·데크로드 L=1,515m
8	목재문화 체험장	성주면	산림공원과	·무궁화수목원 내 ·사업비: 52억원 (국21, 시31) ·`21. 3. 준공 예정 ·체험장, 영상실 등
9	성주산 숲 하늘길 걷기 체험시설	성주면	미래사업과	·무궁화수목원 내 ·사업비: 20억원(폐광기금) ·10월 중 준공 예정 ·L=172m, H=6~14m

3

사업장별 시정(개선) 요구사항

사 업 명	시정(개선) 요구사항	소관부서
1. 쇗개포구 명소화 조 성 (남대천 마을조성)	❍ 서해안 유일의 감조하천이라는 특수성과 포구라는 역사성을 살릴 수 있도록 사업을 추진하기 바람. 특히, 배가 드나는 것을 재현할 수 있도록 높이를 높이거나 아치형으로 설치될 수 있는 방안을 검토해주기 바람. ❍ 역세권과 쇗개포구 인도교 사이 거리가 500m로 이 구간내 우리 지역을 찾는 관광객들에게 야경, 쇗개포구 상징 포토존, 역사적 설명 표지판 등 볼거리를 제공할 수 있도록 타 부서와 협업하여 다양한 사업들을 고민해주기 바람. ❍ 역세권이 어둡다는 민원이 많은 만큼 나무에 조명을 설치하는 등 주변 경관과 어우러 질 수 있도록 조명을 설치해 주기 바람. 또한, 구시에도 조명시설을 설치하여 가까운 거리에 있는 전통시장 까지 연결될 수 있도록 사업계획에 반영 하기바람. ❍ 시내권과 역세권을 연결하는 사업임을 감안하여 인도교 양측 대로에 안전한 보행이 가능하도록 조치 바람. ❍ 어울림센터를 위해 5년된 건물을 철거하고 신축하는 등 매몰비용이 발생되는 부분을 감안하여 사업계획을 신중히 검토하기 바람. ❍ 원도심활력 충전 프로젝트 등 관련 사업들이 당초 계획된 일정에 맞게 추진되는지 점검하기 바람.	도시재생과
2. 광장형 야외 공연장 조성	❍ 이후 계획된 어린이 공원사업에 있어 주민설명회, 공청회 등 주민들과 충분한 대화를 통해 재투자하는 일이 생기지 않도록 추진 바람. ❍ 공사 마무리 단계에 콘크리트 보강공사 등 단차를 줄일 수 있도록 하기 바람. ❍ 버스킹 시설이 충분히 만들어지는 만큼 동아리 지원사업 등 공연을 할 수 있는 분들을 발굴 할 수 있는 여건 조성 바람. ❍ 무대 벽면 활용 방안을 고민하기 바람.	문화새마을과
3. 도시재생지원 센 터	❍ 도시 재생뉴딜사업의 성격을 가지고 매년 지속가능한 도시 재생사업이 될 수 있도록 노력해 주기 바람. ❍ 주민과의 갈등이 많을 것으로 예상되니 최대한 주민의 입장에서 노력해주기 바람. ❍ 사업예산의 절반 정도가 소요되는 어울림센터라는 커뮤니티 공간의 효과성 부분을 재고하여 주기 바람. ❍ 낙후된 마을이 활기를 되찾을 수 있도록 하는 것이 재생사업의 주목적인 만큼 주민들이 경제적 이익을 얻을 수 있는 방향으로 사업이 진행될 수 있도록 노력해 주기 바람. ❍ 권역별 유사한 사업이 아닌 관광, 전통시장, 문화, 산업 등 각 권역의 특색을 살려 주기 바람. ❍ 주거공간은 노후화되고 공실을 보완하는 방향으로 추진되어야 함에도 새로운 시설을 신축하는 것으로 공급만 늘어 나는 상황임. 기존의 공간을 재활용하고, 주변을 새롭게 단장하는 방향으로 추진 검토하기 바람.	도시재생과
4. 대천-죽정동간 도시계획도로 건설	❍ 터널 길이가 260m가 포함되어 있어 기술적으로 안전문제에 신중을 기해 추진하기 바람. ❍ 최대한 곡선을 줄이고 직선화하는 방향으로 검토하기 바람. ❍ 원형 로터리로 인해 육거리가 생겨 학생을 포함한 보행자의 안전이 우려 되므로, 주민의 안전과 이용 효율성을 높일 수 있도록 현재 계획중인 2개의 로터리를 1개로 변경 검토하기 바람. ❍ 장마 시 배수 문제가 생기지 않도록 절개지 부분에 배수로 공사에 주의를 기울이기 바람.	도 로 과
5. 천북해상낚시터	❍ 여성이나 가족 단위 관광객이 많이 찾을 것으로 예상되므로 인근 굴단지에서 잡은 물고기를 요리하는 등 연계 될 수 있는 방안 검토 ❍ 어촌계에서 걱정하는 안전에 대한 문제에 대해 신중히 검토바람. ❍ 많은 관광객이 찾을 수 있도록 치어 방류 등 어장관리에 신경을 쓰기 바라며, 향후 가두리 양식장을 통해 방류할 수 있는 방안도 검토하기 바람. ❍ 개인이 아닌 지역주민이 실질적으로 소득을 얻을 수 있도록 위탁 업체 선정에 신중을 기하기 바람.	해양정책과
6. 주산벚꽃 관광 자원화 사업	❍ 경관조명이 많이 설치되어 전기료 절감 방안을 마련하기 바람. ❍ 관광객을 활용하여 지역주민이 소득을 창출 할 수 있는 방안을 고민해 주기 바람. ❍ 관광객 볼거리를 위해 인공폭포 재가동 검토 바람. ❍ 보령댐 방류가 예상되는 만큼 임시주차장 유실되지 않도록 근본적 대책을 마련 하기 바람. ❍ 데크시설이 오래 유지 될 수 있도록 오일스테인 등 관리에 철저를 기하기 바람.	관 광 과
7. 보령댐 데크시설	❍ 이후 데크 설치시 오래 유지 될 수 있도록 자재 선정에 신중을 기하기 바람. ❍ 주차시설을 확충할 수 있도록 방안을 마련하기 바람.
8. 목재문화 체험장	❍ 전문적인 교육을 원하는 시민을 위한 프로그램 설치 등 시민을 수요를 파악 하여 운영하여 주시기 바람. 또한, 타 지역에서 큰 효과를 보지 못한 사례가 있듯이 주 원료는 목재지만 특색있고 차별화된 교육과목을 선정해 주기 바람. ❍ 운영비가 많이 들어가는 만큼 커피숍 운영, 입장료 수입 등 수익을 창출할 수 있는 방안을 마련하기 바람. ❍ 관광객들을 위해 시설 확충을 통한 볼거리 제공, 수목관리, 시설 청결에 철저를 기하기 바람.	산림공원과
9. 성주산 숲 하늘길 걷기 체험시설	❍ 시민들의 기대보다 길이가 짧아서 아쉬운 점이 있음. 추후 확장 방안을 모색해 주기 바람. ❍ 기둥과 자연이 어우러지도록 조성하는 등 타지역과 차별화 될 수 있는 방안을 고민해 주기 바람	미래사업과