2020. 12.

2020年度

行政事務監査資料

水 道 課

【 공 통 분 야 】
□ 주요사업장 방문 시정(건의)사항 조치현황 (조치 및 이행 유무) ---------------------------------------------------	3
□ 행정심판 및 각종소송 추진상황(행정, 민사, 국가) ----------	3
□ 불허가 및 반려 민원내역 --------------------------------------------	4
□ 민간행사보조금, 민간위탁금, 민간경상사업보조, 민간단체 법정운영비보조 집행현황 ---------------------------------	4
□ 민간자본사업보조 예산 및 집행내역(교부조건포함) ---------	6
□ 보조금 집행 위반사항 및 조치(행정처분·고발 등) 현황 ---	6
□ 연구(정책용역 포함)․학술 용역비 예산 및 집행내역 ------	7
□ 민간인 해외여행 지원현황(2019∼2020) -------------------------	7
□ 중앙(권익위 포함),도,자체감사 지적사항 처리결과(2018∼2020) ----	8
중앙(권익위 포함),도,이첩민원 처리사항(2018∼2020) ---------	8
각종 시설공사계획 및 추진실적(1억원이상, 2020년도) -----	8
2018~2020년도 예산 중 불용․전용 처리된 예산현황 --------	10
사고이월, 명시이월, 계속비사업 추진현황(2천만원 이상) (2017~2019년 사고이월, 명시이월 통계 표함) ------------------	11
국도비 요구 및 확보내역 (2018~2020년 확보금액 통계 포함) -------------------------------	14
특수시책 추진현황 -----------------------------------------------------	17
민간위탁 기관 현황 ---------------------------------------------------	19
보령시 각종 위원회 위원명부(성별,위촉직 임기표시) 및 예산액․회의개최 실적(2019∼2020) ------------------------------	20
민선7기 시장 공약사항 추진현황 ---------------------------------	21
보령시 주요 공공시설 사용료부과징수 현황(2018~2020) ---	22
과태료 부과징수 현황 -------------------------------------------------	22

특별교부세 배정 및 사업 추진 현황(2018∼2020) ------------	22
2020년도 공모사업 현황 ---------------------------------------------	22
각종 축제 현황 ---------------------------------------------------------	23
각종 업무추진비 집행내역 및 지출결의서 사본 -----------------	23
고가 첨단장비 보관 및 활용 현황 (3천만원 이상) ----------	23
CCTV 화소별 현황, 회선사용료, 시설장비유지비 집행내역(2018∼2020) -----	23
각종 공사 3회 이상 설계변경 사업 현황(5천만원이상) ----	24
5천만원이상 공사 입찰잔액 현황 및 사용내역 ---------------	25
주민참여감독제 추진 현황(3천만원 이상) ----------------------	27
행정재산(건물) 보유 및 관리현황(청사제외) ------------------	27
각종 공무원 포상금 집행현황(2019∼2020) -------------------------	28
관용차 유류비 및 수선비 지급내역 ------------------------------	28
각종 앱 개발 현황(2018∼2020) -----------------------------------	29
국도77호 개통에 따른 부서별 추진현황 ------------------------	30
의회 정책협의회 안건에 대한 부서의 진행상황과 결과 ---	32
민간위탁사업 감사내역(2018~2020) -------------------------------	32
각종 협약(MOU 등) 추진 현황(2018~2020) --------------------	32
코로나19 사업비 집행내역 ------------------------------------------	33
코로나19 발생에 따른 부서별 방역 대책 및 추진현황 -----	34
코로나19 각종 시설사용료 감면 현황 및 감면 기준 --------	35
코로나19로 인한 각종 행사 취소 현황 --------------------------	35
코로나19 관련 집단 및 다중이용시설 등 관리현황 ---------	35

【 소 관 분 야 】
□ 지방상수도 시설 확충사업 추진현황 -----------------------------	39
□ 보령댐 주변지역 지원 및 정비사업 추진현황 -----------------	41
□ 상수도 누수현황 --------------------------------------------------------	43
□ 도서 담수화시설 운영 상황 -----------------------------------------	44
□ 마을하수도 실태 및 향후계획(도서지역 포함) ----------------	46
□ 각종 사업 수의계약 현황(1천만원 이상) ------------------------	47
□ 공공하수처리시설 운영관리 업무지침 ---------------------------	51
□ 상하수도 원인자 부담금 추가 부담 현황(2018～2020) ------	53
하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 관련 계약 변경현황 -----	54
상수도 관로 누수신고 및 처리현황(2018~2020) ---------------	54
별첨① 보령시 위원회 현황 ------------------------------------------------	55

共  通  分  野

공 통	1	제 목	주요사업장 방문 시정(건의)사항 조치현황

-  해   당   사   항   없   음 -

공 통	2	제 목	행정심판 및 각종소송 추진상황(행정,민사,국가) (2018~2019)

□ 현    황

구 분	계	소 송 결 과				진행중	비 고
		소계	승소	패소	소취하 조 정
계	1	0	0	0	0	1
행정소송	0	0	0	0	0	0
민사소송	1	0	0	0	0	1

□ 소송내용

사건명 (사건번호)	원고	청 구 요 지	판결일자	소송 결과
계	1건
토지사용료 청구의 소 (2019가단3011)	박** 이**	보령시는 원고 소유 토지(신흑동 911-68)를 무단 점유하여 가압장을 설치(1989년)하였기에 금75,455,810원 및 연12% 비율에 의한 금원을 지급 청구하는 소	-	진행중

공 통	3	제 목	불허가 및 반려 민원 내역

-  해   당   사   항   없   음 -

공 통	4	제 목	민간행사보조금, 민간경상사업보조, 민간단체 법정운영비보조 집행현황

□ 민간경상사업보조 내역

연번	읍면	경 상 사 업 명	사업량	사업비 (천원)	추진현황	비고
계		27건		215,763	완 료: 13건 추진중: 14건
1	남포	주민 편의물품 구입	1식	20,000	추진중	보령댐 지원사업
2	남포	마을 방역 지원	1식	6,221	추진중	〃
3	남포	마을방송 회선 사용료 지원	1식	1,200	추진중	〃
4	남포	새마을 지도자회 운영비	1식	2,000	추진중	〃
5	남포	새마을 부녀회 운영비	1식	2,000	추진중	〃
6	남포	풍물단 지원	1식	6,000	추진중	〃
7	남포	마을회관 물품 구입	1식	6,000	추진중	〃
8	주산	주산 보령댐 주변 용배수로 정비 및 관리사업	1식	6,000	완료	〃
9	주산	화산천 생태공원 정비 및 관리	1식	8,000	추진중	〃
10	미산	풍물단 지원	1식	5,000	추진중	〃
11	미산	보령댐 수질보전 지원	1식	10,000	추진중	보령댐 지원사업
12	미산	면민회관 및 다목적실 관리	1식	25,742	추진중	〃
13	미산	농특산물 판매장 관리	1식	10,000	완료	〃
14	미산	주민편의 물품 구입	1식	42,000	완료	〃
15	미산	체육회 물품 구입	1식	15,000	추진중	〃
16	성주	성주1리 소화기 및 화재경보기 구입	1식	2,500	완료	〃
17	성주	성주2리 친환경세제 및 화장지구입	1식	2,500	완료	〃
18	성주	성주4리 마을회관 공동생활홈 생활용품구입	1식	3,700	완료	〃
19	성주	성주5리 친환경세제 및 화장지구입	1식	7,100	완료	〃
20	성주	성주6리 친환경세제 및 화장지구입	1식	4,600	완료	〃
21	성주	성주7리 난방기 및 화장지구입	1식	4,600	완료	〃
22	성주	성주8리 상수도 뚜껑 구입	1식	5,200	완료	〃
23	성주	개화1리 친환경세제 및 화장지구입	1식	4,000	완료	〃
24	성주	개화2리 친환경세제 및 화장지구입	1식	4,600	완료	〃
25	성주	개화3리 친환경세제 및 화장지구입	1식	3,800	완료	〃
26	성주	성주 자율방범대 차량유류비 지원	1식	2,000	추진중	〃
27	성주	성주 체육회 운영비 지원	1식	6,000	추진중	〃

공 통	5	제 목	민간자본보조사업 예산 및 집행내역

연번	읍면	사 업 명	예산액 (천원)	집행액 (천원)	지 원 단체명	추진 현황	비고
		4건	195,000	193,160		완 료: 3건 추진중: 1건
1	웅천	평2리 마을회관 집기구입	8,000	6,160	평2리 추진위원회	추진중	보령댐 지원사업
2	미산	보령댐 주변 휴양시설 설치지원	160,000	160,000	미산면민 협의회	완료	〃
3	미산	도화담1리 노인회관 당구대 구입	12,000	12,000	도화담1리 추진위원회	완료	〃
4	성주	성주1리 쉼터 원두막 보수	15,000	15,000	성주1리 추진위원회	완료	〃

공 통	6	제 목	보조금 집행 위반사항 및 조치현황

-  해   당   사   항   없   음 -

공 통	7	제 목	연구․학술 용역비 예산 및 집행내역

용 역 명	용역비 (천원)	계약방법	용역주요내용	수 급 자		용 역 결 과 시정반영사항
				업 체 명	대표자
계	45,975		3건
2019 회계연도 상수도 지방공기업 특별회계 결산검사 용역	12,000	수의	○ 예산관리·집행의 적정성 ○ 손익계산서 및 대차 대조표 작성 ○ 총괄원가계산서 작성	신 한 회계법인	이상문	상수도 공기업 경영실태 및 성과 분석 ※공기업 재무 개선 반영 <지방공기업법 제35조제3항〉
2019 회계연도 하수도 지방공기업 특별회계 결산검사 용역	12,000	수의	○ 예산관리·집행의 적정성 ○ 손익계산서 및 대차 대조표 작성 ○ 총괄원가계산서 작성	신 한 회계법인	이상문	하수도 공기업 경영실태 및 성과 분석 ※공기업 재무 개선 반영 <지방공기업법 제35조제3항〉
보령시 하수처리수 재이용수 공급비용산정용역	21,975	수의견적 (2인)입찰	○영업비용 및 자본비용 산정 ○총괄원가 산정 ○재이용수 요금 결정	백석대학교 산학협력단	한정수	보령하수처리수 재이용수(10,000㎥/일) 한국중부발전 공급을 위한 공급원가 산정

공 통	8	제 목	민간인 해외여행 지원 현황(2019~2020)

-  해   당   사   항   없   음 -

공 통	9	제 목	중앙․도․자체감사 지적사항 처리결과 (2018~2020)

-  해   당   사   항   없   음 -

공 통	10	제 목	중앙, 도 이첩민원 처리사항(2018~2020)

-  해   당   사   항   없   음 -

공 통	11	제 목	각종 시설공사계획 및 추진실적 (1억원 이상, 2020년도)

연번	사 업 명	사업량	사업비 (백만원)	집행액 (백만원)	추진현황		수 급 자
					사업 기간	진도(%)	업체명	대표자
계	29개 사업		28,998	13,360	․ 완 료: 9건 ․ 추진중: 20건
1	삽시도(밤섬) 도서 식수원 개량공사	상수도관 매설 L=2.1Km	150	130	20.05.21.~ 20.06.26.	100	(유) 아민건설	김경아
2	효자도 도서 식수원 개량공사	해수담수화시설교체 75톤	160	153	20.05.19.~ 20.09.15.	100	백보산업 (주)	장석우
3	원산도(초전) 도서 식수원 개량공사	해수담수화시설교체 75톤	150	144	20.05.19.~ 20.09.15.	100	백보산업 (주)	장석우
4	웅천 수부3리 상수도 시설공사	상수도관 매설 L=920m	300	119	20.05.26.~ 20.07.24.	90 (일시정지)	㈜ 우리종합관리	우원명
5	주포 관산리 상수도 시설공사(2차)	상수도관 매설 L=1.0km	100	8	20.09.18.~ 20.12.16.	80	세종토건 (주)	정태익
6	청라면 상수도 시설사업(폐광)	상수도관 매설 L=9.04km, 가압장 1개소	914	53	20.10.15.~ 21.03.18	10	㈜ 삼익토건	김인식
7	남포면 제석리 상수도 시설공사	상수도관 매설 L=0.5km 가압장 1개소	200	133	20.04.20.~ 20.09.08.	100	㈜ 대형건설	김문희
8	주교 관창1리 상수도 시설공사	상수도관매설 L=708m	150	8	20.07.29.~ 20.11.15.	70 (일시정지)	우미건설 (주)	이환구
9	성주1리 상수도 시설공사	상수도관 매설 L=9.04km, 가압장 1개소	450	25	20.11.09.~ 21.02.06.	10	우미건설 (주)	이환구
10	청라면(나원리 외 3개소) 상수도 시설공사(폐광)	상수도관 매설 L=15km, 가압장 2개소	2,250	-	미착공	-	실시설계 용역 중 (21.2월 완료예정)
11	보령하수처리시설 반응조 덮개설치공사	반응조 덮개 1식	1,059	1,037	20.05.29~ 20.09.25.	100	㈜디에이치	구자옥
12	남포처리장 생물반응조 회전담체 교체공사	바이오휠 교체 1식	260	19	시설관리공단 자체설비 시험중
13	웅천,무창포처리장 섬유여과기 보수공사	섬유여과기 보수 2식	140	122	20.04.24~ 20.06.07.	100	삼진설비㈜	김현기
14	웅천 송풍기외 2건 인버터설치 및 자동화시스템 구축	인버터 및 자동화시스템 설치 1식	103	88	20.05.29~ 20.07.24.	100	㈜나웅테크	나학균
15	무창포처리장 PLC판넬 및 중앙감시제어 교체공사	중앙감시제어 교체 1식	166	146	20.04.22~ 20.07.20.	100	나라솔라텍(주)	임인순
16	웅천처리장 협잡물 및 침사제거기 교체공사	협잡물종합처리기 교체1식	216	-	20.09.11~ 20.11.30.	60	㈜에싸	윤영내
17	명천동 빗물배수로 설치	배수로 L=3.2㎞ 유수지 5,080㎥	1,467	1,460	17.08.07.~ 20.06.02.	100	㈜삼우	이정우
18	무창포 하수처리구역 하수관거 설치	하수관로 L=8.4㎞	2,930	1,100	17.10.27.~ 20.11.11.	98	(유)C.R.C	백성완
19	국도36호선 주변마을 하수관로 정비	하수관로 L=31km	2,963	1,347	19.08.26.~ 22.08.24.	10	㈜경도	문주명
20	죽정동 불량하수관거 정비	하수관로 L=4.7km	2,375	1,768	17.11.13~ 20.11.17.	95	황전건설㈜	이근수
21	죽정동 하수관로 정비사업	배수설비 40가구 등	250	28	20.10.12.~ 21.02.08.	30	대보수도	최미자
22	신대리 및 강당마을하수관로 정비	하수관로 L=2.9km 등	2,007	89	20.10.5.~ 21.09.21.	10	경원건설주식회사	양은희
23	천북 하만리 및 동대동 하수관거 정비	하수관로 L=0.6km 등	300	197	20.05.29.~ 20.11.28.	80	우미건설 (주)	이환구
24	주포․주교 면단위 하수처리장 설치	Ｑ=230㎥/일 하수관 L=23㎞	5,387	3,608	19.12.31.~ 22.02.22.	30	서대종합건설(주)	정해천
25	보령 하수처리수 재이용	Ｑ=10,000㎥/일 L=8.7km	283	283	미착공	-	실시설계 용역 중 (21.3월 완료예정)
26	청라면 의평지구 면단위하수처리장 설치	Ｑ=370㎥/일 하수관로 L=12㎞	2,336	35	미착공	-	실시설계 용역 중 (20.12월 완료예정)
27	원산도 농어촌마을 하수도 정비사업	하수처리시설 Q=700㎡/일	1,336	1,022	미착공	-	실시설계 용역 중 (21.3월 완료예정)
28	성주 공공하수처리장 설치사업	하수처리시설 Q=700㎡/일	396	238	미착공	-	실시설계 용역 중 (20.11월 완료예정)
							실시설계 용역 중 (20.11월 완료예정)
						-
					미착공
				-
			200
		하수관로 L=130m, 배수설비 10가구
	보령호 상류지역 하수관로 정비사업(추가분)
29

공 통	12	제 목	2018~2020 예산 중 불용․전용 처리된 예산현황

사 업 명	위 치	사업량	사업 기간	전용 예산 (백만원)	전용사유	비고
계		1건		30
명천동 빗물배수로 설치공사	명천동, 궁촌동	배수로 L=3.2km 유수지 5,080㎥	2017 ∼ 2020	30	o 감리용역과 공사 시공기간이 불일치하여 감리용역 기간을 연장코자 감리비 부족분에 대하여 시설비 예산 전용

공 통	13	제 목	사고이월, 명시이월, 계속비 사업 추진 현황 (2천만원 이상)

□ 사고이월, 명시이월, 계속비 사업 추진현황

연번	사 업 명	사업량	사업비 (천원)	이월사유	사업기간	추진 상황
계	54개 사업		31,454,208	․ 완 료: 32건 ․ 추진중: 22건
1	소규모수도시설 보안시설설치공사	보안시설설치 30개소	69,852	절대공기부족 (명시이월)	19.11.20.~ 20.05.12.	완료
2	작은샘실(삼곡1리) 소규모급수시설 개량공사	관정개발 1식	47,130	절대공기부족 (명시이월)	19.11.06.~ 20.12.31.	공 사 추진중 (90%)
3	2019년 절수기기 보급사업	절수기 설치 1식	40,000	절대공기부족 (명시이월)	19.12.1.~ 20.08.20.	완료
4	웅천 관당3리 (간드리마을) 상수도 시설공사	상수도관 매설 L=1.3km, 가압장 1개소	58,802	절대공기부족 (사고이월)	18.07.19.~ 19.09.22.	완료
5	주교 신대1리 상수도 시설(2차)공사	상수도관매설 L=1.6km	212,868	절대공기부족 (명시이월)	19.08.13.~ 20.07.02.	완료
6	주포 관산리 상수도 시설공사	상수도관매설 L=0.9km	25,659	절대공기부족 (명시이월)	19.11.27.~ 20.01.22.	완료
7	오천 수정동 마을 상수도 시설공사	상수도관 매설 L=1.8km	250,000	절대공기부족 (명시이월)	19.12.26.~ 20.06.24.	완료
8	웅천읍사무소 앞 노후상수도관교체	노후상수도관 교체 L=0.3km	165,839	절대공기부족 (명시이월)	19.08.12.~ 19.12.28.	완료
9	화산동 가압장 설치(본관)	가압장 1개소	77,624	절대공기부족 (명시이월)	19.08.13.~ 20.03.22.	완료
10	국도40호(성주~미산) 상수도관 이설	배수관로 이설 L=3.6km, 제수변실 10개소	899,868	절대공기부족 (명시이월)	19.09.23.~ 21.11.01.	공 사 추진중 (95%)
11	국도40호(주포~오천)상수도관 이설	상수도관 이설 L=1.7km 가압장 1개소	252,504	절대공기부족 (명시이월)	20.02.19.~ 20.10.30.	공 사 추진중 (95%)
12	청라 신산리 상수도 시설(폐광기금)	상수도관 이설 L=5.1km 가압장 1개소	571,556	절대공기부족 (명시이월)	19.12.30.~ 20.08.09.	공 사 추진중 (95%)
13	내항1통 상수도 시설공사	상수도관매설 L=0.4km 가압장 1개소	185,280	절대공기부족 (명시이월)	19.09.30.~ 19.12.27.	완료
14	대천2동(여고~중부발전)노후관 교체	노후관 교체 L=1.0km	382,400	절대공기부족 (명시이월)	20.03.04.~ 20.07.15.	완료
15	보령시 수도정비기본계획변경수립용역	수도정비기본계획 (변경) 수립1식	828,707	절대공기부족 (명시이월)	19.05.08.~ 20.12.23.	용 역 추진중 (65%)
16	주교3리 상수도 시설	상수도관 매설 L=3.5km	120,935	절대공기부족 (명시이월)	19.08.06.~ 19.12.20.	완료
17	천북 장은3리 노후상수도관 교체공사	상수도관 매설 L=3.0km 가압장 2개소	452,513	절대공기부족 (명시이월)	19.10.07.~ 20.03.10.	완료
18	오천 영보2리(솟재수해길) 상수도 시설공사	상수도관매설 L=3.1km	297,200	절대공기부족 (명시이월)	19.12.20.~ 20.07.08.	완료
19	지방도 610호 상수도 시설구간 정비공사	아스팔트 절삭 및 덧씌우기 (B=3m, L=3.1km)	230,910	절대공기부족 (명시이월)	19.11.14.~ 20.02.25.	완료
20	남곡3통 상수도 시설	상수도관매설 L=0.8km 가압장 1개소	177,310	절대공기부족 (명시이월)	19.12.30.~ 20.05.11.	완료
21	주교 관창리 상수도 시설공사	상수도관 매설 L=1.4km	300,000	절대공기부족 (명시이월)	20.03.11.~ 20.06.30.	완료
22	웅천 석재단지 상수도 정비공사	상수도관 매설 L=0.7km	500,000	절대공기부족 (명시이월)	20.06.10.~ 20.09.22.	완료
23	대창6리 상수도 시설공사	상수도관 매설 L=0.514km	40,000	절대공기부족 (명시이월)	19.11.14.~ 20.03.02.	완료
24	대천 해수욕장 상수도 맨홀뚜껑 교체	상수도맨홀 교체 1식	25,000	절대공기부족 (명시이월)	19.12.20.~ 20.01.17.	완료
25	사현(옥서2리)마을 상수도개량공사	관정개발 1식	47,110	절대공기부족 (명시이월)	19.05.08.~ 20.04.06.	완료
26	남포농어촌 지방상수도시설공사	상수도관 매설 L=18.3km, 배수지1개소 (V=6,500mm) 가압장 6개소	459,501	계속비 사업	16. 01.~ 20. 12.	공 사 추진중 (97%)
27	오천농어촌 (원산도,효자도) 지방상수도 시설공사	배수지 1개소(V=900㎥), 가압장 2개소, 상수도관 매설 L=44km	508,169	계속비 사업	16. 01.~ 23. 12.	재원협의
28	미산농어촌 지방상수도시설공사	가압장 2개소, 상수도관 매설 L=84.5km	856,522	계속비 사업	18. 01.~ 23. 12.	용 역 추진중 (95%)
29	성주농어촌 지방상수도시설공사	상수도관 매설 L=15.2km, 가압장 2개소	847,286	계속비 사업	18. 01.~ 21. 12.	공 사 추진중 (70%)
30	웅천농어촌 지방상수도 시설공사	상수도관매설 L=32km 가압장 3개소	781,436	계속비 사업	18. 01.~ 22. 12.	공 사 추진중 (40%)
31	보령 창동정수장 개량사업	정수장 전면개량 Q=13,000㎥/d	2,982,544	계속비 사업	18. 01.~ 22. 12.	공 사 계약중
32	상수도 생활민원 처리사업	민원처리 1식	76,198	절대공기부족 (명시이월)	20.1.~ 20.12.	수시처리
33	죽청2리 3차 상수도 시설공사 GIS DB 구축용역	상수도 시설물 DB구축 L=1.93km	20,000	절대공기부족 (명시이월)	19.11.28.~ 20.01.21.	완료
34	지방도 606호 상수도 시설공사 정비공사	실시설계용역 1식	48,461	절대공기부족 (명시이월)	19.9.24.~ 19.12.22.	완료
35	동지역 노후급수관 및 다발관 교체	동지역 노후관 교체 1식	120,000	절대공기부족 (명시이월)	20.01.~ 20.12.	완료
36	읍,면지역 노후급수관 및 다발관 교체	읍,면 지역 노후관 교체 1식	120,000	절대공기부족 (명시이월)	20.01.~ 20.12.	완료
37	보령하수처리시설 악취방지공사	침전지 덮개설치1식	800,000	절대공기부족 (명시이월)	19.09.11.~ 20.05.08.	완료
38	성주하수처리장 하수관로 보수공사	관로보수1식	336,507	절대공기부족 (명시이월)	19.07.16.~ 20.03.12.	완료
39	국도40호(도화담) 하수도 이설공사	L=1,412m	983,602	절대공기부족 (명시이월)	19.09.10.~ 21.06.10.	공사중
40	보령 하수처리장 슬러지건조시설 통합환경허가용역	통합환경허가 1식	80,000	절대공기부족 (명시이월)	19.10.24~ 20.10.22.	완료
41	동대동(436-1번지일원) 하수관로 이설	L=650m	60,000	이설토지 협의지연 (명시이월)	19.08.01.~ 20.12.	토지매입협의중
42	공공하수처리시설 기술진단	기술진단 1식	282,244	절대공기부족 (명시이월)	19.7.10. ~20.3.11.	완료
43	신대리 및 강당마을하수관로정비	하수관로 L=2.9km 등	1,928,980	절대공기부족 (명시이월)	20.10.05.~ 21.09.21.	공 사 추진중 (10%)
44	도화담리 마을하수도 정비	하수관로 L=48m	33,077	절대공기부족 (명시이월)	20.6.10.~ 20.09.21.	완료
45	명천동 빗물배수로 설치	배수로 L=3.2㎞ 유수지 5,080㎥	1,765,336	절대공기부족 (계속비이월)	17.08.07.~ 20.06.02.	완료
46	주포․주교 면단위 하수처리장 설치	Ｑ=230㎥/일 하수관 L=23㎞	4,736,020	절대공기부족 (계속비이월)	19.12.31.~ 22.02.22.	공 사 추진중 (30%)
47	국도36호선 주변마을 하수관로 정비	하수관로 L=31km	314,796	절대공기부족 (계속비이월)	19.08.26.~ 22.08.24.	공 사 추진중 (10%)
48	무창포 하수처리구역 하수관거 설치	하수관로 L=8.4㎞	2,930,078	절대공기부족 (계속비이월)	17.10.27.~ 20.11.11.	공 사 추진중 (98%)
49	성주 공공하수처리장 설치사업	하수처리시설 Q=700㎡/일	182,076	절대공기부족 (계속비이월)	2019~2022	설계 중
50	청라면 의평지구 면단위하수처리장 설치	Ｑ=370㎥/일 하수관로 L=12㎞	2,018,814	절대공기부족 (계속비이월)	2017~2022	설계 중
51	원산도 농어촌마을 하수도 정비	하수처리시설 Q=700㎡/일	83,053	절대공기부족 (계속비이월)	2019~2023	설계 중
52	죽정동 불량 하수관거 정비	하수관로 L=4.7km	1,300,964	절대공기부족 (계속비이월)	19.03.12.~ 20.11.17.	공 사 추진중 (98%)
53	동대동 노후관 교체 및 하수관로 정비	하수관로 L=1.6km	361,565	절대공기부족 (계속비이월)	19.01.30.~ 19.12.26.	완료
54	보령호 상류지역 하수처리시설 정비	하수관로 L=1.1km	177,912	절대공기부족 (계속비이월)	19.05.30.~ 19.12.26.	완료

□ 명시이월, 사고이월, 계속비 이월 통계 (2017~2019)

(단위: 백만원)

구 분	합 계		명시이월		사고이월		계속비
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	170	69,960	115	24,243	18	3,354	37	42,363
2017	49	17,284	37	5,729	3	227	9	11,328
2018	58	21,101	38	7,417	6	1,293	14	12,391
2019	63	31,575	40	11,097	9	1,834	14	18,644

공 통	14	제 목	국도비 요구 및 확보내역

□ 2020년 국·도비 요구 및 확보내역

연번	사 업 명	위 치	사업량	요구액(백만원)			확보액(백만원)			비고
				계	국비	도비	계	국비	도비
계	14개 사업			18,781	11,376	7,405	18,781	11,376	7,405
1	남포 농어촌 지방상수도 시설	남포면 일 원	상수도관 매설 L=18.3km, 배수지1개소, (V=6,500mm) 가압장 6개소	2,690	-	2,690	2,690	-	2,690
2	오천 농어촌 (원산,효자도) 지방상수도 시설	오천면 일 원	배수지 1개소(V=900㎥), 가압장 2개소, 상수도관 매설 L=44km	704	-	704	704	-	704
3	미산 농어촌 지방상수도 시설	미산면 일 원	가압장 2개소, 상수도관 매설 L=84.5km	607	-	607	607	-	607
4	성주 농어촌 지방상수도 시설	성주면 일 원	상수도관 매설 L=15.2km, 가압장 2개소	729	-	729	729	-	729
5	웅천 농어촌 지방상수도 시설	웅천읍 일 원	상수도관 매설 L=32km 가압장 3개소	607	-	607	607	-	607
6	보령 창동정수장 개량	남포면 창동리 산2-46	정수장 전면개량 Q=13,000㎥/d	2,500	2,500	-	2,500	2,500	-
7	보령 노후상수도관 정비	보령시 일 원	노후상수도관망 정비 L=213km	4,596	3,535	1,061	4,596	3,535	1,061
8	소규모 수도시설 개량공사	청 라 면 나원 2리 외 17개소	관로 시설 2개소, 물탱크 교체 2개소, 보안 시설 14개소	280	-	280	280	-	280
9	국도36호 주변마을 하수관로 정비	남포면, 대천5동	하수관로 31.3km	1,782	1,782	-	1,782	1,782	-
10	주포·주교 농어촌 마을하수도 정비	주포면, 주교면	하수처리시설 Q=230㎥/일(신설)	1,251	1,024	227	1,251	1,024	227
11	청라 의평지구 농어촌 마을하수도 정비	주포면, 주교면	하수처리시설 Q=370㎥/일(증설 270㎥/일)	485	400	85	485	400	85
12	보령하수처리수 재이용	대천동	Q=10,000㎥/일	198	198	-	198	198	-
13	원산도 농어촌마을하수도정비사업	오천면	하수처리시설 Q=700㎥/일(신설)	2,170	1,787	383	2,170	1,787	383
14	성주공공하수처리시설 설치사업	성주면	하수처리시설 Q=1,400㎥/일(증설 700㎥/일)	182	150	32	182	150	32

□ 2021년 국·도비 요구내역

연번	사 업 명	위 치	사업량	요구액(백만원)			비고
				계	국비	도비
계	21개 사업			63,816	43,019	20,767
1	정수장 위생관리개선	창동정수장	정수장 정비 1식	10	10	-
2	스마트 관망 관리 인프라구축	관내 일원	스마트 관망관리 1식	1,439	1,439	-
3	옥내배관세척사업	관내 일원	세척사업 1식	63	-	63
4	하수관거 정비 BTL 임대료	관내 일원	임대료 1식	2,132	2,132	-
5	노후하수관거 정밀조사	관내 일원	정밀조사 1식	512	512	-
6	오천 농어촌 (원산,효자도) 지방상수도시설	오천면 일원	배수지 1개소(V=900㎥), 가압장 2개소, 상수도관 매설 L=44km	9,500	-	9,500
7	미산 농어촌 지방상수도 시설	미산면 일원	가압장 2개소, 상수도관 매설 L=84.5km	4,000	-	4,000
8	성주 농어촌 지방상수도 시설	성주면 일원	상수도관 매설 L=15.2km, 가압장 2개소	790	-	790
9	웅천 농어촌 지방상수도 시설	웅천읍 일원	상수도관매설 L=32km 가압장 3개소	2,300	-	2,300
10	보령 창동정수장 개량	남포면 창동리 산2-46임	정수장 전면개량 Q=13,000㎥/d	5,500	5,500	-
11	보령 노후상수도관 정비	보령시 일원	노후 상수도관망 정비 L=213km	3,394	2,611	783
12	소규모수도시설 개량공사	청라면 장현2리	관정개발 1식 물탱크 1식 노후관로 교체 1식	190	-	190
13	주교․동대처리분구 (관창․은포․송학․평신) 하수관거정비사업	주교면, 동대동 일원	하수관로 L=37.2km, 배수설비 1,106가구	5,200	5,170	-
14	흑포․사곡처리분구 (강당마을)하수관거 정비사업	신흑동 일원	하수관로 L=6.3km, 배수설비 101가구	2,100	2,100	-
15	웅천 성동․노천 처리분구 하수관거정비사업	웅천 성동,노천리 일원	하수관로 L=11.6km, 배수설비 325가구	910	910	-
16	원산도 농어촌마을 하수도 정비사업	오천면	하수관로 L=15km, 하수처리시설 Q=600㎥/일(신설)	3,400	2,800	600
17	주포․주교면단위 하수처리시설 설치	주포면, 주교면	하수관로 L=26km, 하수처리시설 Q=230㎥/일(신설)	5,100	4,200	900
18	보령 하수처리수 재이용사업	대천동	하수처리수 재이용시설 Q=10,000㎥/일	3,777	3,777	-
19	청라 의평지구 면단위 하수처리시설 설치	주포면, 주교면	하수관로 L=15.7km, 하수처리시설 증설 300㎥/일	4,904	4,039	865
20	성주 공공하수처리시설설치사업	성주면	하수처리시설 Q=1,400㎥/일(증설700㎥/일)	4,395	3,619	776
21	국도36호 주변마을 하수관로 설치	남포면, 대천5동	하수관로 L=31.3km	4,200	4,200	-

□ 중앙 부처 방문실적

관련사업	일 시	부처	면 담 자	내 용	비고
2020년 하수도 국비 예산 협의	2020.01.09.	환경부	나 길 사무관 임갑선 사무관	20년 하수도사업 국비 지원 건의 (주교처리분구 외 6건/62억원)
보령 창동정수장 개량공사	2020.06.18.	금강유역환경청	상수원관리과 전민경 팀장	보령 창동정수장 개량공사 수도사업변경인가 협의
보령시 지방상수도 현대화사업	2020.07.23.	환경부	물이용기획과 오지현 사무관	지방상수도 현대화사업 우선사업대상지 사전협의
20년 하수도분야 예산 집행점검	2020.08.21.	환경부	권상현 주무관	20년 하수도예산 집행점검 및 예산 편성 회의

□ 연도별 국·도비 확보금액(2018~2020)

(단위: 백만원)

연 도	건 수	총 확보액
		계	국비	도비
계	50	60,531	43,813	16,718
2018	18	15,834	14,105	1,729
2019	18	25,916	18,332	7,584
2020	14	18,781	11,376	7,405

공 통	15	제 목	특수시책 추진 현황

□ 수도요금 문자고지 서비스

◇ 상하수도 요금 문자 고지를 통한 신속·정확한 행정서비스 구현

◇ 장기간 부재, 타 지역 거주 중인 수용가 체납 사전 예방

□ 시행근거

○ 「보령시 상수도 급수 조례」 제36조 제1항

□ 추진사항

○ 2020. 4.: 기존 상․하수도 프로그램에 문자메시지 고지 서비스 구축

○ 2020. 5.: 유선 또는 사이버창구를 통한 실시간 신청·민원 서비스 제공

□ 상․하수도요금 신용카드 자동납부 서비스

◇ 실시간 요금 납부 및 자동이체 신청으로 요금 업무의 효율성 증가 및 수용가 편의 도모

□ 시행근거

○ 「보령시 상수도 급수 조례」 제37조

□ 추진사항

○ 2020.2.: 상·하수도 요금 신용카드 자동납부 서비스 구축

○ 2020.4.: 상하수도 신용카드 자동납부 시스템 보도자료 홍보

○ 2020.5.: 신용카드 자동이체 수용가를 대상으로 문자서비스 시행 및 신청접수 안내

□ 지방상수도 현대화사업

◇ 노후상수관망 정비를 통한 사업대상구역 유수율 85% 이상 달성

□ 사업개요

○ 사업기간: 2020년 ~ 2024년(5년간)

○ 사업구역: 창동 급수구역(사업대상구역은 환경부 사전기술검토 후 최종 확정)

○ 사 업 량: 블록시스템 구축, 유지관리시스템 구축, 관망정비 213㎞,

누수탐사 및 복구 1,816개소

○ 총사업비: 34,820백만원(국비 17,410, 도비 5,223, 시비 12,187)

※ 2020년 예산액: 7,070백만 원 (국비 3,535 도비 1,060 시비 2,575)

○ 사업방식: 공공전문기관(K-water) 위탁

□ 그간 추진사항

○ 2019.12.: 지방상수도 현대화사업 위·수탁 일괄 협약(K-water)

○ 2020. 7.: 우선사업대상지 협의(환경부) 선정 / 창동 급수구역(대천3,4,5동)

○ 2020. 9.: 우선 사업 대상지 누수탐사용역 착수

○ 2020.10.: 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역 착수

□ 이후계획

○ 2021. 7.: 사전기술검토 신청

○ 2022. 9.: 현대화사업 착공(블록구축시스템 병행)

○ 2024.12.: 사업 준공

□ A형간염 바이러스 예방을 위한 하수처리시설 확충

◇ 바지락양식장 주변 갯벌의 오염이 심각한 상황으로 주변 육상

오염원 차단을 위한 하수처리시설 확충 필요

□ 추진 배경

○ 주교면 및 신흑동 일원 바지락 양식장에서 A형간염 바이러스가  검출되어 육상오염원(하천 및 생활하수) 차단을 위한 하수도정비  (관로신설) 긴급 시행

▶ 주교면: 하수관로 신설 L=33.8㎞, 배수설비 981가구(사업비 32,230백만원)

▶ 신흑동: 하수관로 신설 L=3.3㎞, 배수설비 101가구(사업비 5,322백만원)

□ 그간 추진사항

○ 2020. 1.: 주교면 및 신흑동 일원 하수관로 정비시기 변경(2035년→2025년)

○ 2020. 2.: 자체재원(시비) 先투입(1회 추경)

○ 2020. 3.: 2021년 국비 신청(49억원 요청)

○ 2020. 9: 기본 및 실시설계용역 착수

□ 이후계획

○ 2021. 11.: 공사착공       ○ 2022. 12.: 준공

공 통	16	제 목	민간위탁 기관 현황

용 역 명	위 탁 업체명	위탁 기간	세 부 사 항
			모집 사항	공고시 참여업체	위탁조건	심의위원회 의결여부
보령시 소규모 공공하수처리시설 관리대행	㈜테크로스 환경서비스 & 대호산업 (주)	2016.9.1.~ 2021.8.31.	공개	①㈜하이엔텍 ②㈜에스엠엔지니어링 ③금강엔지니어링(주) ④성지환경기술(주)	공공하수처리시설 29개소 운영관리 및 중계펌프장, 맨홀펌프장, 차집관로 등 부대시설 운영관리	심의의결

공 통	17	제 목	각종 위원회 위원명부 및 예산액, 회의 개최 실적(2019~2020)

□ 보령시 수돗물평가위원회

○ 위원명부: 15명(남 7, 여 8)

연번	구 분	소 속	직 위	성 명	성별	비 고
1	위원장	보 령 시	부시장	정낙춘	남	당연직
2	위원	보령시경제도시국	국장	김호원	남	임 명
3	위원	보령시경제도시국 수도과	과장	최인묵	남	임 명
4	위원	충남도립대학교(환경보건과)	교수	양재경	남	19.4. ~ 21.4.
5	위원	보령교육지원청	학교보건 급식팀장	백성의	여	19.4. ~ 21.4.
6	위원	한국수자원공사보령권관리단	차장	임성호	남	19.4. ~ 21.4.
7	위원	보령시새마을부녀회	회장	김종숙	여	19.4. ~ 21.4.
8	위원	소비자교육보령시지회	대표	황희자	여	19.4. ~ 21.4.
9	위원	대한적십자봉사회 보령지구협의회	대표	우재옥	여	19.4. ~ 21.4.
10	위원	한국걸스카우트 충남연맹보령지구연합회	대표	정태경	여	19.4. ~ 21.4.
11	위원	한국여성농업인 보령시연합회	대표	임정원	여	19.4. ~ 21.4.
12	위원	보령시재향군인회 여성회	대표	조성미	여	19.4. ~ 21.4.
13	위원	이‧통장협의회	대표	이태영	남	19.4. ~ 21.4.
14	위원	충청타임즈	부장	오종진	남	19.4. ~ 21.4.
15	위원	前공무원	前 동장	이희자	여	19.4. ~ 21.4.
	간사	보령시 경제도시국 수도과	관리팀장	김소영	여

○ 예 산 액

연 도	2019	2020	비 고
예산액(천원)	1,820	1,820

○ 회의개최 실적

연도	개최일	개최방법	내 용(안건 등)
2019	12. 21.	소집회의	수돗물 수질검사 내용 심의, 수도시설 운영에 관한 자문

□ BTL 성과평가위원회

○ 위원명부: 10명(남9, 여1)

연번	구 분	소 속	직 위	성 명	성별	비 고
1	위원장	보령시수도과	과 장	최인묵	남	당연직
2	위 원	보령시수도과	관리팀장	김소영	여	임 기 제 한 없 음
3	위 원	보령흰여울(주)	소장	유영준	남
4	위 원	보령흰여울(주)	대표이사	김규열	남
5	위 원	주민대표		최삼영	남
6	위 원	공주대학교 환경공학과	교수	김동욱	남
7	위 원	충남도립대학교 환경보건과	교수	양재경	남
8	위 원	충남도립대학교 건설정보학과	교수	서상구	남
9	위 원	보령시시설관리공단	본부장	노경호	남
10	위 원	한국엔지니어링(주)	부사장	나득주	남

○ 예 산 액

연 도	2019	2020	비 고
예산액(천원)	5,600	5,600

○ 회의개최 실적

연 도	개최일	개최방법	내 용
2019	2. 27.	대면심의	2018년 4/4분기 성과평가
	6. 18.	대면심의	2019년 1/4분기 성과평가
	9. 4.	대면심의	2019년 2/4분기 성과평가
	12. 16	대면심의	2019년 3/4분기 성과평가
2020	3. 2.	서면심의	2019년 4/4분기 성과평가
	6. 5.	서면심의	2020년 1/4분기 성과평가
	9. 7.	서면심의	2020년 2/4분기 성과평가

공 통	18	제 목	민선7기 시장 공약사항 추진현황

-  해   당   사   항   없   음 -

공 통	19	제 목	주요 공공시설 사용료 부과 징수 현황

-  해   당   사   항   없   음 -

공 통	20	제 목	과태료 부과징수 현황

-  해   당   사   항   없   음 -

공 통	21	제 목	특별교부세 배정 및 사업 추진 현황 (2018~2020)

-  해   당   사   항   없   음 -

공 통	22	제 목	2020년도 공모사업 현황

-  해   당   사   항   없   음 -

공 통	23	제 목	각종 축제 현황

-  해   당   사   항   없   음 -

공 통	24	제 목	각종 업무추진비 집행내역 및 지출결의서 사본 (50만원이상)

□ 집행내역

연번	지출일자	집 행 내 역	집행금액(원)	비 고
1	2020.10.29.	오천농어촌 지방상수도 시설공사 관련 광역상수도 공급 업무 협의 만찬	628,000	시책추진 업무추진비

공 통	25	제 목	고가 첨단장비 보관 및 활용 현황 (3천만원이상)

□ 장비보유현황

연번	장 비 명	수 량	보관처	장비관리자		비고
				정	부
1	디지털 상관식 누수탐지기	본체 1EA 노트북 1EA	수도과 상수도팀	상수도팀장	시설8급 박기연

공 통	26	제 목	CCTV 화소별 현황, 회선사용료, 시설장비유지비 집행내역(2018~2020)

-  해   당   사   항   없   음 -

공 통	27	제 목	각종 공사 3회이상 설계변경 사업현황 (5천만원이상)

연번	사 업 명	업 체 명	사업비 (백만원)		증‧ 감 (백만원)	변경사유
계	3개 사업
1	죽정동 불량하수관거 정비	황전건설㈜ 이근수	계약	1,276
			1차	1,377	101	- 계획고 조정 등
			2차	1,511	134	- 관종변경 장비운반비 적용 등
			3차	1,338	△ 173	- 배수설비 가구감소 등
2	명천동 빗물배수로 설치	㈜삼우 이정우	계약	5,349
			1차	4,936	△ 413	- 설계오류 등
			2차	5,073	137	- 물가변동 및 도 감사 지적사항 반영 등
			3차	4,510	△ 563	- 물가변동 반영
			4차	4,612	102	- 우수BOX 개량
3	무창포 하수처리구역 하수관거 설치	(유)씨알씨 백성완	계약	2,600
			1차	2,600	-	- 관급자재 단가변경
			2차	2,555	△ 45	- 도 감사지적사항 반영
			3차	2,727	172	배수설비 가구 추가
			4차	2,643	△ 84	맨홀펌프장 2개소 감소

공 통	28	제 목	5천만원이상 공사 입찰잔액 현황 및 사용내역

연번	사 업 명	사업비 (천원)	입찰잔액 (천원)	사용액 (천원)	사용내역	비고
계	34개 사업	16,694,624	2,047,413	-
1	보령하수처리시설 반응조 덮개설치공사	1,059,134	22,134	-	사용내역 없음
2	웅천,무창포처리장 섬유여과기 보수공사	140,135	18,129	-	사용내역 없음
3	슬러지처리시설 컨베이어 수선공사	50,518	6,484	-	사용내역 없음
4	웅천 송풍기외 2건 인버터설치 및 자동화시스템 구축	103,342	15,742	-	사용내역 없음
5	무창포처리장 PLC판넬 및 중앙감시제어 교체공사	165,869	19,610	-	사용내역 없음
6	웅천 수부3리 상수도 시설공사	300,000	17,571	-	사용내역 없음
7	주포 관산리 상수도 시설공사(2차)	100,000	6,902	-	사용내역 없음
8	청라면 상수도 시설사업(폐광)	661,110	55,267	-	사용내역 없음
9	남포면 제석리 상수도 시설공사	200,000	11,180	-	사용내역 없음
10	신송1리 마을안길 아스콘 덧씌우기	50,000	2,198	-	사용내역 없음
11	청라(장산,황룡) 아스콘 덧씌우기	139,500	6,183	-	사용내역 없음
12	주교 관창1리 상수도 시설공사	150,000	7,436	-	사용내역 없음
13	마을상수도 보안시설 설치공사	84,500	2,908	-	사용내역 없음
14	윗잉낭 소규모 수도 시설개량 공사	89,190	10,199	-	사용내역 없음
15	신흥동 소규모 수도 시설개량 공사	49,460	4,455	-	사용내역 없음
16	심곡 소규모 수도 시설개량 공사	79,280	6,342	-	사용내역 없음
17	장밭 소규모 수도 시설개량 공사	89,190	10,203	-	사용내역 없음
18	소규모 수도시설 보안시설 설치공사	90,000	2,131	-	사용내역 없음
19	하조(봉성리) 소규모 급수시설개량 공사	49,550	4,764	-	사용내역 없음
20	늑전리 마을안길아스콘 덧씌우기공사	49,550	1,700	-	사용내역 없음
21	고대도 도서식수원 개량공사	60,000	8,822	-	5회 추경 삭감
22	삽시도(밤섬) 도서 식수원개량공사	148,920	19,144	-	5회 추경 삭감
23	삽시도(윗말) 도서 식수원개량공사	60,000	7,498	-	5회 추경 삭감
24	효자도 도서식수원 개량공사	158,848	6,264	-	5회 추경 삭감
25	원산도(초전) 도서 식수원개량공사	148,920	5,010	-	5회 추경 삭감
26	녹도 도서식수원 개량공사	69,370	9,981	-	5회 추경 삭감
27	호도 도서식수원(물탱크) 교체공사	59,460	4,628	-	5회 추경 삭감
28	동대동 하수관로 정비	77,161	9,783	-	사용내역 없음
29	동대동 하수관로 정비(추가)	96,215	12,707	-	사용내역 없음
30	미산 도화담 하수관로 설치	55,170	6,643	-	사용내역 없음
31	신대리 및 강당마을 하수관로 정비	1,066,160	129,773	-	사용내역 없음
32	신대리 및 강당마을 하수관로정비 전기 공사	67,832	8,493	-	사용내역 없음
33	죽정동 하수관로 설치	148,705	19,594	-	사용내역 없음
34	주포‧주교 농어촌마을 하수도정비	10,777,535	1,567,535	-	사용내역 없음

공 통	29	제 목	주민참여감독제 추진 현황(3천만원 이상)

연번	사 업 명	사 업 량	사업비 (백만원)	사업기간	업 체 명	주민참여감독자
계	13개 사업		1,080
1	윗잉낭소규모수도 시설개량공사	상수도관 매설 L=842m	90	20.04.27 ~20.06.25	보령도시에너지 건설(주) 홍대령	나원2리 이장 오 종 민
2	장밭소규모수도 시설개량공사	상수도관 매설 L=981m	90	20.04.24 ~20.06.22	부경엔지니어링(주) 백경희	장현1리 이장 김 문 한
3	심곡소규모수도 시설개량공사	상수도관 매설 L=400m	80	20.04.27 ~20.06.25	대진건설(주) 장동수	금암2리 이장 임 정 혁
4	늑전리마을안길 아스콘덧씌우기공사	아스콘덧씌우기 1식	50	20.04.24 ~20.05.22	㈜정명건설 강명자	늑전리 이장 임 송 순
5	신흥동소규모수도 시설개량공사	물탱크설치 30톤 1개소	50	20.04.22 ~20.05.19	우미건설(주) 이환구	신대3리 이장 강 철 호
6	하조(봉성리)소규모 급수시설개량공사	관정개발 1식	50	20.05.06 ~20.07.04	청풍건설(주) 박인걸	봉성리 이장 임 인 빈
7	고대도도서식수원 개량공사	관정개발 1식	60	20.05.11 ~20.07.09	㈜홍광산업 한영춘	고대도 이장 김 흥 태
8	삽시도(윗말)도서 식수원개량공사	물탱크설치 50톤 1개소	60	20.05.06 ~20.07.04	㈜동광 박석수	삽시도 이장 김 기 태
9	삽시도(밤섬)도서 식수원개량공사	상수도관 매설 L=2.1㎞	150	20.05.21 ~20.07.19	(유)아민건설 김경아	삽시도 이장 김 기 태
10	녹도도서식수원 개량공사	해수담수화시설 보수 1식	70	20.06.15 ~20.08.13	㈜천마산업개발 이종천	녹도 이장 김 성 용
11	장고도도서식수원 (관정)개발공사	관정개발 1식	70	20.07.07 ~20.10.29	㈜백산산업개발 명소윤	장고도 이장 편 현 숙
12	호도도서식수원 (물탱크)교체공사	물탱크설치 50톤 1개소	60	20.07.09 ~20.08.27	대진건설(주) 장동수	호도 이장 김 영 복
13	죽정동 하수관로 설치사업	하수도관 매설 L=518m	200	20.10.12 ~21.02.08	(합)대보수도 최미자	죽정1통장 노 풍 호

공 통	30	제 목	행정재산(건물)보유 및 관리현황(청사제외)

구 분	시설명	소재지	시설 규모		사 용 자	사용 내역	사용 기간	사용료 (원)	비 고
			층수	면적
사용허가	보령시 수도과	대천로 35	4	1,104.37㎡	바르게살기운동보령시협의회	41.18㎡	18.1.1.~ 20.12.31.	무상	「바르게살기운동조직 육성법」 제4조
					보령시여성 단체협의회	105.49㎡	18.1.1.~ 20.12.31.	6,246,190

공 통	31	제 목	각종 공무원 포상금 집행현황(2019~2020)

-  해   당   사   항   없   음 -

공 통	32	제 목	관용차 유류비 및 수선비 지급내역

구 분	일 자	적 요	지급금액 (원)	거래처명	비고
		13건	8,548,020
유 류 비	2019.12.12.	누수보수 행정차량(86조1825) 유류구입	805,730	대관주유소
	2019.12.24.	누수보수 행정차량(95어4898) 유류구입	940,020	대관주유소
	2020.01.29.	행정차량(36무7086) 유류구입	79,500	대관주유소
	2020.02.06.	관리팀 행정차량(84어9843) 유류구입	678,720	대관주유소
	2020.03.02.	누수보수 행정차량(86조1825) 유류 구입	950,200	대관주유소
	2020.04.17.	누수보수 행정차량(95어4898) 유류 구입	773,050	대관주유소
	2020.06.22.	관리팀 행정차량(84어9843) 유류구입	554,610	대관주유소
	2020.06.26.	누수보수 행정차량(80라0564) 유류 구입	790,020	대관주유소
	2020.06.26.	누수보수 행정차량(86조1825) 유류 구입	790,020	대관주유소
	2020.07.06.	누수보수 행정차량(80라0564) 요소수 구입	100,000	대관주유소
	2020.08.31.	누수보수 행정차량(80라0564) 유류 구입	804,270	대관주유소
	2020.09.28.	누수보수 행정차량(86조1825) 유류 구입	689,380	대관주유소
	2020.10.08.	관리팀 행정차량(84어9843) 유류구입	592,500	대관주유소
		21건	6,697,020
수 선 비	2019.11.05.	누수보수행정차량 엔진오일 교환(95어4898)	97,900	일전사	엔진오일 교환
	2019.11.15.	누수보수 행정차량 방송장비 구입(95어4898)	550,000	우리산업안전물산	방송장비
	2019.12.03.	관리팀 행정차량(84어9843) 수리	251,900	일전사	엔진오일 교환 등
	2019.12.13.	관리팀 행정차량(84어9843) 수리	517,000	일전사	팽창 밸브 교환 등
	2019.12.18.	관리팀 행정차량(84어9843) 수리	782,100	일전사	파이프 교체 등
	2019.12.18.	누수보수 행정차량 수리 및 엔진오일 교체(86조1825)	308,000	일전사	엔진오일 교체
	2020.02.18.	누수보수 행정차량 수리(86조1825)	99,000	일전사	브레이크 교환 등
	2020.03.10.	누수보수 행정차량(95어4898) 엔진오일 교환	97,900	일전사	엔진오일 교환
	2020.03.12	관리팀 행정차량(84어9843) 수리	295,900	일전사	발전기 교환 등
	2020.03.16.	누수보수 행정차량(95어4898) 수리	99,000	일전사	터보차져 교환
	2020.04.06.	누수보수 행정차량(95어4898) 타이어 교체	264,000	일전사	타이어 교체 등
	2020.04.16.	누수보수 행정차량(95어4898) 발전기 교환	165,000	일전사	엔진오일 교환
	2020.05.06.	누수보수 행정차량 수리(95어4898)	123,420	현대자동차보령점	타이어 교체 등
	2020.05.06.	누수보수 행정차량 수리(86조1825)	50,600	일전사	파킹 브레이크 레버 교환
	2020.06.12.	누수보수 행정차량 적재함제작 및 경광등 교체	1,540,000	우리산업안전물산	적재함 제작, 경광등 교체
	2020.07.29.	관리팀 행정차량(84어9843) 수리	130,900	일전사	엔진오일, 향균필터 교환
	2020.08.24.	누수보수 행정차량(86조1825) 엔진오일 교환	132,000	일전사	엔진오일 교환
	2020.08.31.	누수보수 행정차량(80라0564)엔진오일 교환	108,900	일전사	엔진오일 교환
	2020.09.01	관리팀 행정차량(84어9843) 수리	236,500	일전사	팬클러치 교환, 가스 완충
	2020.09.28.	누수보수 행정차량(86조1825) 타이어 교체	605,000	일전사	타이어 교체
	2020.10.28.	관리팀 행정차량(84어9843) 수리	242,000	일전사	타이어 교체

공 통	33	제 목	각종 앱 개발 현황(2018~2020)

-  해   당   사   항   없   음 -

공 통	34	제 목	국도77호 개통에 따른 부서별 추진현황

□ 오천농어촌(원산도, 효자도) 지방상수도 시설사업

사업개요

❍ 사 업 명 : 오천농어촌(원산도, 효자도) 지방상수도 시설사업

❍ 사업위치 : 보령시 오천면 원산도리, 효자도리 일원

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2023. 12.

❍ 공사기간 : 설계용역 추진 중

❍ 총사업비 : 9,103백만원(국비1,446, 도비 6,252, 시비 1,405)

❍ 사 업 량 : 배수지 1개소(V=900㎥), 가압장 2개소, 송배수관로 L=44km

그동안 추진현황

○ 2015. 6. : 터널 내 공동구 양측 150mm×2열 매설 승인(대전지방국토관리청)

○ 2017. 3. : 대명리조트 추가수요 반영 위해 관경확장 협의(250mm×2열)

○ 2018. 4. : 터널 내 공동구 양측 관경 조정(200mm×2열) 매설 재협의

○ 2019. 9. : 도시계획시설(수도공급설비) 결정

○ 2020. 2. : 터널 내 공동구 양측 200mm×2열 매설 승인(대전지방국토관리청)

○ 2020. 6. : 도로점용허가 승인(대전지방국토관리청)

○ 2020. 9. : 지방건설기술심의 완료(충청남도)

○ 2020. 10. : 소노리조트 원인자부담금 부과계획 알림 및 회신

사업지연 사유

❍ 도로관리청 협의사항 반영 및 설계용역 결과에 따라 총사업비 변경 충남도 협의 중

향후 추진계획

○ 2020. 11. : 총사업비 변경 및 수도사업인가 신청(충청남도)

○ 2020. 11. : 해저터널 구간 착공

○ 2021.  3. : 본공사 착공

○ 2021. 12. : 해저터널 구간 준공

○ 2023. 12. : 본공사 준공

□ 원산도 공공하수처리시설 신설사업

사업개요

❍ 사 업 명 : 원산도 공공하수처리시설 신설사업

❍ 사업위치 : 보령시 오천면 원산도리 일원

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2023. 12.

❍ 공사기간 : 기본 및 실시설계용역 추진 중

❍ 총사업비 : 26,254백만원(국비18,378, 도비 3,938, 시비 3,938)

❍ 사 업 량 : 하수처리시설 Ｑ=600㎥/일, 오수관로 L=15.3㎞,
배수설비 482가구 등

그동안 추진현황

❍ 2018.  4. : 하수도정비기본계획 승인요청(충청남도 금강유역환경청)

❍ 2019.  6. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2019.  9. : 하수도정비기본계획 승인

❍ 2020.  1. : 하수처리공법 선정(ESSA 공법)

❍ 2020. 10. : 도시관리계획(하수도) 결정 입안

사업지연 사유

❍ 하수처리시설 부지 선정 및 토지보상 지연

향후 추진계획

❍ 2020. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료

❍ 2021.  1. : 설치인가 및 재원협의

❍ 2021.  3. ~ 2023. 12. : 사업 추진(준공)

공 통	35	제 목	의회 정책협의회 안건에 대한 부서 진행상황

안 건 명	진행상황	비 고
보령시 도서지역 수도시설 운영관리 위․수탁사업의결안	완료

보령시 도서지역 수도시설 운영관리 위․수탁 사업 의결안

- 대    상: 고대도 등 18개소

- 기    간: 2020. 2.  ~ 2025. 2. / 5년간

- 체결기관: 한국수자원공사

- 내    용: 고대도 등 18개소 해수담수화시설 운영관리 위․수탁

공 통	36	제 목	민간위탁사업 감사내역

-  해   당   사   항   없   음 -

공 통	37	제 목	각종 협약(MOU등) 추진현황(2018~20220)

협 약 명	체 결 일	비 고
보령시 도서지역 수도시설 운영관리 위․수탁 협약	2020.2.25.

보령시 도서지역 수도시설 운영관리 위․수탁 협약

- 협약기간: 2020. 2. 25. ~ 2025. 2. 24. / 5년간

- 체결기관: 한국수자원공사

- 내    용: 고대도 등 18개소 해수담수화시설 운영관리 위탁

공 통	38	제 목	코로나 19 사업비 집행내역

□ 물품구입비

연번	건 명	집행액 (원)	지출일자	거 래 처	비고
계	10건	2,691,190
1	검침원 마스크 구입	250,000	2020-02-06	일성약국
2	마스크 및 손소독제 구입	360,000	2020-02-17	일성약국
3	마스크 구입	175,000	2020-02-26	광장약국
4	마스크 구입	525,000	2020-03-02	광장약국
5	손세정제(코로나19예방) 구입	100,000	2020-03-25	보령종로약국
6	코로나19 대응 민원창구 가림막 제작	396,000	2020-04-16	현대광고사
7	특별공급(1차) 마스크 구입	270,190	2020-06-25	충청남도 세입세출외 현급출납원
8	정수장 코로나 19 물품 구입 (체온계, 비말마스크, 손소독제)	280,000	2020-09-03	대천의료기 외 1
9	마스크 구입	35,000	2020-09-15	보령종로약국
10	방역 약품구입(소독약)	300,000	2020-09-24	대천의료기

공 통	39	제 목	코로나 19 부서별 방역대책 및 추진현황

□ 청사 출입문 민원안내 데스크 운영

기    간: 2020. 9. 14. ~ 코로나19 상황종료시 까지

장    소: 청사 출입문

인    원: 1명

운영내용

- 방문 민원인 발열체크 및 출입자 명부 작성 안내

- 방문 목적 파악 및 담당 직원 연락, 서류 접수로 민원 접촉 최소화

□ 청사 방역 및 개인위생 철저

기    간: 코로나19 상황종료시 까지

추진내용

-□청사 소독의 날□운영: 주1회 방역 전문 업체 의뢰 ※ 매일 자체 소독 병행

- 코로나19 대응 수도요금 민원 창구 가림막 설치

- 전 직원 마스크 착용 등 개인위생 관리 철저 수시 교육

□ 정수장 등 관련시설 및 상하수도 사업장 감염병 대응체계 구축

- 근로자 건강상태 일일체크 및 감염병 예방물품 현장 비치

- 상․하수도 건설 현장 사무실 등 방역 이행 여부 수시 점검

- 의심환자 발생 시 즉시 조치 및 유사시 비상근무 체계 구축

공 통	40	제 목	코로나19 각종 시설 사용료 감면 현황 및 감면 기준

-  해   당   사   항   없   음  -

공 통	41	제 목	코로나 19로 인한 각종 행사 취소 현황

연번	읍면	사 업 명	예산액 (천원)	비 고
계		7건	109,807
1	웅천	웅천읍 만세보령 문화제 지원	5,672	보 령 댐 지원사업
2	남포	남포면 만세보령 문화제 지원	12,000	〃
3	주산	주산 봄꽃축제 지원	25,205	〃
4	미산	미산 면민 화합행사 지원	37,000	〃
5	미산	미산면 만세보령 문화제 지원	15,000	〃
6	성주	제19회 성주산 단풍축제 지원	9,930	〃
7	성주	제2회 은골마을 영화제 지원	5,000	〃

공 통	42	제 목	코로나19 관련 집단 및 다중이용시설 등 관리현황

-  해   당   사   항   없   음 -

所  管  分  野

수도과	1	제 목	상수도 시설 확충사업 추진 현황

연번	사 업 명	사 업 량	사업비 (백만원)	사업기간	추진상황
계	9개 사업		4,464		완 료: 1건 추진중: 8건
1	웅천 수부3리 상수도 시설공사	상수도관 매설 L=0.9km	300	20.5.26.~ 20.7.24.	추진중 (90%) (일시정지)
2	주포 관산리 상수도 시설공사(2차)	상수도관 매설 L=1.0km	100	20.9.18.~ 20.12.16.	추진중 (90%)
3	청라면 상수도 시설사업(폐광)	상수도관 매설 L=9.04km, 가압장 1개소	914	20.10.15.~ 21.3.18	추진중 (20%)
4	남포면 제석리 상수도 시설공사	상수도관 매설 L=0.5km 가압장 1개소	200	20.4.20.~ 20.9.8.	추진완료 (100%)
5	주교 관창1리 상수도 시설공사	상수도관매설 L=0.7km	150	20.7.29.~ 20.11.15.	추진중 (70%) (일시정지)
6	성주1리 상수도 시설공사	상수도관 매설 L=1.7km, 가압장 1개소	450	2020. 11.~ 2021. 03.	추진중 (10%)
7	청라면(나원리 외 3개소) 상수도 시설공사(폐광)	상수도관 매설 L=15km, 가압장 2개소	2,250	2020. 11.~ 2021. 12.	추진중 (5%)
8	영보1리(석서골길) 상수도 시설공사	상수도관매설 L=0.3km	50	2020. 11.~ 2020. 12.	추진중 (10%)
9	화산동(회현골) 상수도 시설공사	상수도관매설 L=0.6km	50	2020. 11.~ 2020. 12.	추진중 (10%)

□ 추진현황

□ 지방상수도 미설치 지역 향후 추진계획

미설치 지역	〈 추진현황 및 향후계획 〉 환경부「농어촌 지방상수도 확충계획(2016~2022)」에 따라 연차 추진
남포면	2016년~2020년까지 상수도시설 확충사업 2017년 3월 공사 착공 진행중 2020년 12월 공사 준공(예정)
오 천 면 (원산도, 효자도)	2016년~2023년까지 상수도 시설 확충사업 2016년 기본 및 실시설계용역 착수 2020년 2월 해저터널 공동구 내 송수관 매설 도로관리청 협의 승인 2020년 11월 총사업비 변경(9,103백만원 → 31,170백만원) 2020년 11월 해저터널구간 공사 착공(예정) 2021년 3월 본공사, 폐기물처리용역, GIS DB 구축용역 착공(예정) 2023년 12월 사업 준공(예정)
미 산 면	2018년~2023년까지 상수도 시설 확충사업 2018년 기본 및 실시설계용역 착수 2020년 1월 총사업비 변경(8,600백만원 → 16,960백만원) 2020년 4월 수도사업인가 승인 2020년 8월 도로관리심의 완료 2021년 1월 본공사, 폐기물처리용역, GIS DB 구축용역 착공(예정) 2023년 12월 사업 준공(예정)
웅 천 읍	2018년~2022년까지 상수도 시설 확충사업 2018년 기본 및 실시설계용역 착수 2019년 9월 총사업비변경(5,200백만원 → 6,300백만원) 및 수도사업 인가 신청 2020년 3월 공사 착공 2022년 12월 공사 준공(예정)
성 주 면	2018년~2021년까지 상수도 시설 확충사업 2018년 기본 및 실시설계용역 착수 2019년 8월 공사 착공 2020년 8월 총사업비 변경(2,600백만원 → 3,100백만원) 2021년 12월 공사 준공(예정)

수도과	2	제 목	보령댐 주변지역 지원․정비사업 추진 현황

○ 근    거: 「댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률」제41조 및 제43조

○ 대상지역: 5개 읍․면(웅천, 남포, 주산, 미산, 성주)

○ ‘20년 사업비: 576,540천원/40건

(2020. 10월말 현재)

읍면	연번	사 업 명		사 업 량	사업비(천원)	추진현황	비고
총 계				40건	576,540	․완 료: 18건 ․추진중: 22건
소 계				4건	61,672
웅천	1	평1리 마을안길포장		1식	13,672	추진중	보 령 댐 지원사업
	2	수부1리 마을정자 설치		1식	20,000	완료	〃
	3	수부2리 마을 CCTV 설치		1식	20,000	완료	〃
	4	평2리 마을회관 집기구입		1식	8,000	추진중	〃
소 계				7건	43,421
남포	1		마을방송회선사용료 지원	1식	1,200	추진중	보 령 댐 지원사업
	2		주민편의물품 구입	1식	20,000	추진중	〃
	3		마을방역지원	1식	6,221	추진중	〃
	4		새마을지도자협의회 운영비	1식	2,000	추진중	〃
	5		새마을부녀회 운영비	1식	2,000	추진중	〃
	6		풍물단지원	1식	6,000	추진중	〃
	7		마을회관 물품 구입	1식	6,000	추진중	〃
소 계				4건	39,205
주산	1		보령댐주변 용배수로 정비및관리	1식	6,000	완료	보 령 댐 지원사업
	2		화산천 생태공원 정비및관리	1식	8,000	추진중	〃
	3		봄꽃축제 주차장 조성	1식	20,000	추진중	〃
	4		농로,배수로사업	1식	5,205	추진중	〃

읍면	연번	사 업 명	사 업 량	사업비(천원)	추진현황	비고
소 계			10건	351,712
미산	1	풍물단 지원	1식	5,000	추진중	보 령 댐 지원사업
	2	보령댐 수질보전 지원	1식	10,000	추진중	〃
	3	면민회관 및 다목적실 관리	1식	25,742	추진중	〃
	4	농특산물 판매장 관리	1식	10,000	완료	〃
	5	주민편의물품 구입	1식	42,000	완료	〃
	6	체육회 물품 구입	1식	15,000	추진중	〃
	7	보령댐주변 휴양시설 설치지원	1식	160,000	완료	〃
	8	도화담1리 노인회관 당구대 구입	1식	12,000	완료	〃
	9	농산물판매장 도로옆 배수로 및 주차장 포장 공사	1식	70,000	추진중	〃
	10	남심리 농로 포장공사	1식	1,970	추진중	〃
소 계			15건	80,530
성주	1	성주1리 소화기 및 화재경보기 구입	1식	2,500	완료	보 령 댐 지원사업
	2	성주2리 친환경세제 및 화장지 구입	1식	2,500	완료	〃
	3	성주4리 마을회관, 공동 생활홈 생활용품 구입	1식	3,700	완료	〃
	4	성주5리 친환경 세제 및 화장지 구입	1식	7,100	완료	〃
	5	성주6리 친환경 세제 및 화장지 구입	1식	4,600	완료	〃
	6	성주7리 난방기 및 화장지 구입	1식	4,600	완료	〃
	7	성주8리 상수도 뚜껑 구입	1식	5,200	완료	〃
	8	개화1리 친환경 세제 및 화장지 구입	1식	4,000	완료	〃
	9	개화2리 친환경세제 및 화장지 구입	1식	4,600	완료	〃
	10	개화3리 친환경 세제 및 화장지 구입	1식	3,800	완료	〃
	11	자율방범대 차량 유류비 지원	1식	2,000	추진중	〃
	12	체육회 운영 지원	1식	6,000	추진중	〃
	13	성주1리 쉼터 원두막 보수	1식	15,000	완료	〃
	14	제19회 성주산 단풍축제 지원	1식	9,930	2021년 추진 예정 (명시이월)	〃
	15	제2회 은골마을 영화제 지원	1식	5,000	5회 추경 사업변경	〃

수도과	3	제 목	상수도 누수 현황(2018~2020)

□ 상수도 급수인구 및 누수율 현황

(2019. 12. 31. 기준)

인구수 (명)	급수인구 (명)	보급률 (%)	1인 1일 급수량(ℓ)	유수량 (㎥/일)	유수율 (%)	유효 무수수율 (%)	누수율 (%)
104,162	89,805	86	501	24,702	54.8	4.4	40.8

□ 누수방지 대책 추진 현황(2018～2020)

구 분	사업비(백만원)		운 영 실 적	비 고
	연도	금 액
계	합계	6,707
	2018	1,659
	2019	2,706
	2020	2,342
누수보수 및 탐사반운영	소계	3,469
	2018	769	긴급 보수 536건 / 탐사 233건
	2019	1,100	긴급 보수 637건 / 탐사 50건
	2020	1,600	긴급 보수 447건 / 탐사 30건
노후 수도관 개량	소계	2,914
	2018	795	시설관리공단 노후상수도관 교체공사 외 9건(L=5.18km)
	2019	1,507	웅천읍사무소 앞 노후상수도관 교체공사 외 5건(L=5.5km)
	2020	612	웅천 관당리 노후상수도관 교체공사 외 3건(L=1.3km)
노후 계량기 교체	소계	324
	2018	95	노후계량기 교체 563개소
	2019	99	노후계량기 교체 782개소
	2020	130	노후계량기 교체 902개소
상수민원 신고 및 처리현황	2018		신고 946건 / 조치완료 946건	출수 불량, 앵글밸브 등
	2019		신고 1,004건 / 조치완료 1,004건
	2020		신고 704건 / 조치완료 704건

수도과	4	제 목	도서 담수화시설 운영 상황

□ 보령시 도서지역 해수담수화 시설 현황

도 서 명	용량 (㎥/일)	급수 인구 (명)	설치 (교체) 연도	사업비(백만원)			비 고
				계	국비	지방비
18개소	1,220	3,009		780		780
고대도	75	227	‘16	60		60	‘20. 2. 보령시 도서지역 수도시설 운영관리 위탁협약 체결 ⇔한국수자원공사 (5년간)
외연도	150	389	‘14
삽시도(밤섬)	75	147	‘15	150		150
삽시도(윗마을)	75	264	‘16	60		60
호도	30	214	‘01	60		60
장고도	100	285	‘19	70		70
허육도	20	33	‘12
월도	20	48	‘13
육도	50	46	‘18
원산1리(선촌)	50	208	‘04
원산2리(저두)	50	122	‘05
원산2리(점촌)	100	283	‘18
원산3리(사창)	75	266	‘11
원산3리(초전)	75	120	‘20	150		150
소도	50	33	‘17
추도	50	16	‘18
효자도	75	128	‘20	160		160
녹도	100	180	‘16	70		70

□ 보령시 도서지역 해수담수화 설비 운영 실적

구 분	수돗물 공급 실적
	공급량(㎥)		검침량(㎥)		유수율(%)		수도요금(천원)		비 고
2018년	207,731		150,683		72.5		145,633
2019년	220,115		151,673		68.9		149,583
2020년	202,775		151,315		74.6		164,565
증감(△)	△17,340		△358		5.7		14,982		2019년 대비
구 분	운영관리 및 유지보수(천원)
	유지보수비	전력료		인건비		기타		계	비 고
2018년	470,215	81,707		136,190		190,360		878,472
2019년	438,992	88,362		140,158		172,227		839,739
2020년	347,110	84,701		145,176		195,702		772,689
증감(△)	ㅿ91,882	ㅿ3,661		5,018		23,475		ㅿ67,050	2019년 대비

□ 보령시 도서지역 해수담수화설비 생산원가

구 분	전력료 원단위 실적		㎥당 생산원가 (원/㎥)	㎥당 평균요금 (원/㎥)	비 고
	kWh/㎥	전력료/㎥
2018년	4.87	542.25	5,959	966
2019년	5.09	582.58	5,708	986
2020년	5.08	559.77	5,269	1,088
증감(△)	ㅿ0.01	ㅿ22.81	ㅿ439	102	2019년 대비

수도과	5	제 목	마을하수도 실태 및 향후 계획 (도서지역 포함)

□ 소규모 공공하수처리시설(마을하수도) 현황

(단위: 개소)

계	웅천	주포	주교	오천	천북	청소	청라	남포	주산	미산	성주	대천5
43	2	1	1	10	3	2	5	6	1	7	3	2

□ 공공하수처리시설 현황

- 보령 공공하수처리시설     (30,000㎥/일)

- 대천 공공하수처리시설     (11,000㎥/일)

- 웅천 공공하수처리시설      (1,500㎥/일)

- 성주 공공하수처리시설       (700㎥/일)

- 무창포 공공하수처리시설    (1,600㎥/일)

□ 운영현황

○ 5개 실·과별 분산되어 관리하던 공공하수처리시설, 소규모공공하수처리시설을 2013년 9월 1일부터 수도과(전 수도사업소)에서 통합관리

- 시설관리공단 위탁 관리 15개소
(공공하수처리시설 4, 소규모 공공하수처리시설 11)

- 민간위탁 관리 33개소
(공공하수처리시설 1/(주)티에스케이워터, 소규모 공공하수처리시설 32/테크로스환경서비스)

□ 향후계획

○ 시설사업: 성주 하수처리시설(Q=700㎥/일(증설), 2021년 준공),
주교 하수처리시설(Q=230㎥/일, 2021년 준공),
청라 하수처리시설(Q=300㎥/일(증설), 2022년 준공),
원산도 하수처리시설(Q=600㎥/일, 2023년 준공)

○ 기술진단: 금암, 남포, 도화담, 원산3리, 진죽, 하만 공공하수처리시설 / 2020.10.~2021.

○ 취락지역의 생활환경개선, 공공수역인 서해안 수질보전 등을 위하여 보령시 하수도정비 기본계획변경(2019.9.11.)에 따라 공공하수도 보급률 증대

수도과	6	제 목	각종 사업 수의계약 현황 (1천만원 이상)

□ 수의계약 현황

연번	사 업 명	예정가격 (천원)	계약금액 (천원)	계약일	수 급 자
계	65건	3,281,778	2,785,725
1	2019년 하수도 불량맨홀 교체공사	10,593	10,063	2019-11-12	(주)동대수도건설
2	웅천 죽청2리 상수도 시설공사 GIS DB구축 용역	19,934	17,460	2019-11-26	주식회사 정통지리정보
3	주교 신대1리 상수도 시설공사 GIS DB구축 용역	13,251	11,684	2019-11-26	이룸에스앤지(주)
4	국도40호(주포~오천)상수도관(D400mm)하월 이설공사	20,100	17,688	2019-12-09	에스아이건설(주)
5	명천동 빗물배수로 설치공사 관급자재(계측제어설비) 구입	75,520	64,796	2019-12-10	주식회사 나웅테크
6	상수도 맨홀뚜껑 교체공사	21,784	18,619	2019-12-18	(주) 행복수도건설
7	웅천 대천리, 천북 하만리, 동대동 하수관로 정비사업 토질조사용역	11,050	10,276	2020-01-09	대웅엔지니어링주식회사
8	내항동 상수도(자동차학원) 시설공사 실시설계용역	11,122	10,600	2020-01-09	(주)천마건설엔지니어링
9	웅천 수부3리 상수도 시설공사 실시설계용역	15,642	14,900	2020-01-09	해솔이엔지주식회사
10	청라면 의평지구 면단위 하수처리장 기본 및 실시설계 경제성검토(VE)용역	22,000	19,360	2020-01-09	주식회사 바셈
11	남포 제석리 상수도 시설공사 실시설계용역	12,679	11,664	2020-01-16	(주)우경엔지니어링
12	청라 의평지구 면단위 하수처리장 설치사업 설계안전성검토	14,300	13,156	2020-01-20	주식회사 건양기술공사건축사사무소
13	남곡3통 상수도 시설공사 GIS DB구축 용역	17,505	15,000	2020-01-21	주식회사 디엘아이티
14	2020 하수 중계펌프장 준설공사	19,938	17,545	2020-01-22	부국건설(주)
15	정수장 및 배수지 CCTV 보수공사	16,350	14,400	2020-01-23	대경정보통신 주식회사
16	명천동 빗물배수로 설치사업 관급자재(폴리에스테르 수지 콘크리트관)설계변경 추가분	15,312	15,312	2020-02-04	주식회사 대원콘크리트
17	주교면 관창리 상수도 시설 GIS DB 구축 용역	20,906	18,400	2020-02-14	주식회사 디엘아이티
18	주교면 관창리 상수도 시설공사 폐기물 처리 용역	18,040	15,800	2020-02-14	충경산업 주식회사
19	오천농어촌(원산도, 효자도) 지방상수도 시설공사 경제성검토(설계VE) 용역	21,662	19,000	2020-02-14	(주)상아매니지먼트컨설팅
20	남곡3통 상수도 시설공사 폐기물 처리 용역	15,446	13,590	2020-02-14	충경산업 주식회사
21	대천2동(여고~중부발전) 노후관 교체공사 GIS DB 구축 용역	19,402	17,000	2020-02-17	주식회사 디엘아이티
22	죽정동 하수관로 설치사업 실시설계용역	21,820	19,202	2020-02-18	대웅엔지니어링주식회사
23	대천2동(여고~중부발전) 노후관 교체공사 폐기물 처리 용역	21,598	19,000	2020-02-25	삼원환경산업주식회사
24	배수지 전등설비 교체공사	14,850	13,800	2020-02-26	주식회사 거성전력
25	성주면사무소 앞 외 1개소 하수맨홀 보수공사	11,819	11,819	2020-02-26	조우건설(주)
26	신송1리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사	18,198	16,000	2020-03-05	주식회사 도화
27	중계펌프장 펌프 교체공사	21,927	19,295	2020-03-11	정일기계공업
28	명천동 빗물배수로 설치공사 관급자재(CCTV설비)구입	58,000	49,030	2020-03-16	주식회사 나웅테크
29	대천배수펌프장 원동기 펌프 엔진교체	21,780	19,166	2020-03-25	주식회사 창성이엔씨
30	보령공공하수처리시설 슬러지 계면계 설치공사	18,244	16,054	2020-03-30	주식회사 대산전력
31	성주정수장 라돈제거장치 설치공사	13,396	12,460	2020-04-13	(주)럭키건설
32	청라(장산,황룡) 아스콘 덧씌우기 공사 실시설계용역	11,244	10,500	2020-04-13	해솔이엔지주식회사
33	읍면동지역 계량기 보호통 교체공사 실시설계용역	13,117	12,200	2020-04-13	대웅엔지니어링주식회사
34	미산면 용수리 오수관로 정비공사	15,800	13,904	2020-04-21	주식회사 다온
35	소규모(금암, 도화담)처리장 인버터 구매 설치	41,452	36,470	2020-04-24	주식회사 나웅테크
36	남포 제석리 아스콘 덧씌우기 공사	13,270	11,677	2020-05-11	신보령 주식회사
37	성주정수장 자동여과기 여과재 교체공사	11,990	10,791	2020-05-11	(주)행복수도건설
38	성주정수장 라돈제거장치 설치공사 관급자재(소형정수장치)	18,604	16,400	2020-05-13	주식회사 제이에스이엔지
39	무창포처리장 반응조 개선공사 관급자재	45,730	40,025	2020-05-20	주식회사 나웅테크
40	명천동 오수관거 정비공사	19,802	17,425	2020-05-22	(주)천마건설엔지니어링
41	웅천처리장 협잡물 및 침사제거기 교체공사 실시설계용역	10,808	10,051	2020-05-22	부경엔지니어링 주식회사
42	웅천 대천리, 천북 하만리, 동대동 등 하수관로 정비사업 시공검사용역	12,061	11,216	2020-05-22	주식회사 선화건설
43	성주 공공하수처리시설 설치사업 설계안전성검토용역	16,240	14,291	2020-05-22	주식회사 선진엔지니어링종합건축사사무소
44	웅천 수부3리 상수도 시설공사 폐기물처리용역	11,248	10,460	2020-05-25	삼원환경산업주식회사
45	웅천 수부3리 상수도 시설공사 GIS DB구축 용역	19,035	16,433	2020-05-25	주식회사 디엘아이티
46	웅천처리장 송풍기외 2건 인버터 구매 설치	103,342	87,600	2020-05-29	주식회사 나웅테크
47	주포·주교 농어촌마을 하수도 정비사업 기계 관급자재(수중펌프)	21,703	19,098	2020-06-02	주식회사 세원수중펌프
48	웅천 취수장 철거공사	15,836	14,720	2020-06-17	삼원환경산업(주)
49	국도36호선 주변마을 하수관로 설치사업 관급자재(PVC하수관)	927,027	784,576	2020-06-23	주식회사 거산
50	주포·주교 농어촌마을 하수도 정비사업 관급자재(PVC하수관)	724,213	595,396	2020-06-23	주식회사 거산
51	동대동 도시계획도로 하수관로 정비공사	11,418	10,610	2020-07-02	조우건설(주)
52	원산도 공공하수처리시설 신설사업 기본 및 실시설계용역 경제성검토(VE)용역	22,000	19,360	2020-07-27	주식회사 드림이엔지
53	원산도 공공하수처리시설 신설사업 설계안전성검토용역	16,436	14,463	2020-07-28	주식회사 경동엔지니어링
54	주교 관창1리 상수도 시설공사 GIS DB 구축 용역	11,200	10,200	2020-07-31	주식회사 디엘아이티
55	성주 급수구역 누수 탐사 용역	21,809	19,500	2020-08-06	주식회사 수림기술
56	보령호 상류지역 하수관로 정비공사(추가분) 실시설계용역	12,165	11,313	2020-08-26	대웅엔지니어링주식회사
57	남포농어촌 지방상수도 시설공사(통신) 관급자재	345,437	269,010	2020-08-26	주식회사 나웅테크
58	남포처리장 생물반응조 바이오휠 철거공사	21,327	18,767	2020-08-26	(주)이코
59	웅천읍 대창리(철물점) 배수설비 이설공사	16,030	11,745	2020-08-31	조우건설(주)
60	남포농어촌 지방상수도 시설공사(2차) 실시설계용역	20,972	19,290	2020-09-09	해솔이엔지주식회사
61	삽시도 하수처리시설 개선공사(전기)	15,745	13,855	2020-09-15	주식회사 거성전력
62	웅천 정수장 및 신흑 양수장 철거공사	11,519	10,950	2020-10-07	주식회사 은포산업개발
63	죽정동 하수관로 설치사업 폐기물처리용역	10,880	10,118	2020-10-07	주식회사 보령환경산업
64	신대리 및 강당마을 하수관로 정비사업 관급자재(GRP맨홀)	38,150	33,572	2020-10-07	주식회사 한국화이바
65	2020 하수도 불량맨홀 교체공사	20,000	17,600	2020-10-21	(주) 행복수도건설

수도과	7	제 목	공공하수처리시설 운영관리 업무지침

□ 보령시 마을 단위 하수처리시설 현황(2018~2020)

(단위: 개소)

연도	계	웅천	주포	주교	오천	천북	청소	청라	남포	주산	미산	성주	대천5
2018	40	2	1	1	8	2	2	5	6	1	7	3	2
2019	43	2	1	1	10	3	2	5	6	1	7	3	2
2020	43	2	1	1	10	3	2	5	6	1	7	3	2

□ 유입수 및 방류수 수질검사 현황(2018~2020)

○ 유입수 및 방류수 수질검사 횟수

- 시설용량 50㎥/일 이상 500㎥/일 미만: 주 1회

- 시설용량 50㎥/일 미만: 월 1회

○ 수질검사항목: BOD, COD, SS, T-N, T-P, 총대장균군

○ 수질분석기관: 보령시시설관리공단

○ 연도별 수질검사 결과(시설공단)

(단위: ㎎/ℓ, 개/㎖)

1. 보령공공하수처리시설

연 도	구 분	항 목
		BOD	COD	SS	T-N	T-P	총대장균군
설계수질		142.7	138.9	184.6	33.700	6.300	58,590
2018	유입수	241.1	130.9	289.5	32.730	3.761	259,971
	방류수	4.3	9.0	3.8	11.282	0.438	123
2019	유입수	113.6	109.8	87.4	25.392	2.283	220,431
	방류수	5.0	10.4	4.9	13.663	0.573	405
2020	유입수	98.8	111.9	108.0	26.819	2.602	63,100
	방류수	2.4	10.2	2.5	11.359	0.422	189

2. 웅천공공하수처리시설

연 도	구 분	항 목
		BOD	COD	SS	T-N	T-P	총대장균군
설계수질		181.5	176.7	209.1	39.900	7.700	113,644
2018	유입수	178.4	100.3	91.8	33.382	4.159	185,450
	방류수	2.1	8.5	1.9	10.198	0.284	155
2019	유입수	116.5	82.6	81.5	32.758	3.308	200,492
	방류수	1.8	6.2	1.5	9.112	0.279	151
2020	유입수	107.1	64.8	66.4	31.039	3.210	50,313
	방류수	2.0	6.6	1.4	8.361	0.161	105

3. 무창포공공하수처리시설

연 도	구 분	항 목
		BOD	COD	SS	T-N	T-P	총대장균군
설계수질		154.0	141.0	177.0	33.700	6.300
2018	유입수	157.1	95.9	89.9	33.154	3.816	173,962
	방류수	1.9	8.9	1.6	8.204	0.525	148
2019	유입수	125.0	84.8	87.0	35.014	3.627	213,666
	방류수	1.9	10.6	1.5	7.249	0.336	169
2020	유입수	139.1	78.2	110.1	39.283	3.996	87,655
	방류수	1.6	7.7	1.5	8.499	0.355	121

4. 성주공공하수처리시설

연 도	구 분	항 목
		BOD	COD	SS	T-N	T-P	총대장균군
설계수질		150.0	139.0	150.0	27.000	3.700
2018	유입수	143.1	98.2	92.5	32.430	3.715	177,260
	방류수	1.8	10.0	1.5	9.244	0.690	183
2019	유입수	115.3	77.4	82.1	28.846	2.903	205,938
	방류수	1.9	7.6	2.3	6.815	0.585	187
2020	유입수	96.6	62.0	82.1	28.307	2.851	60,863
	방류수	2.1	7.0	1.9	6.542	0.615	98

5. 대천해수욕장공공하수처리시설

연 도	구 분	항 목
		BOD	COD	SS	T-N	T-P	총대장균군
설계수질		140	121	156	30.2	5.4
2018	유입수	127.4	115.7	130.0	36.250	4.497	125,912
	방류수	2.7	9.9	2.9	3.921	0.852	264
2019	유입수	168.1	86.9	99.3	50.410	5.276	152,470
	방류수	2.5	11.0	2.0	4.995	0.880	144
2020	유입수	168.5	101.4	132.7	56.699	5.235	165,909
	방류수	2.7	9.1	2.1	4.329	0.757	121

수도과	8	제 목	상하수도 원인자부담금 추가 부담 현황 (2018~2020)

□ 원인자부담금 추가 부담 현황

○ 건물증축, 용도변경, 공장증설 등에 의한 추가 원인자부담금

(단위 : 건, 천원)

연 도	구분	항 목
		합계	건물증축	용도변경	공장증설
2018	건수	14	2	12	-
	금액	181,590	43,923	137,667	-
2019	건수	13	5	8	-
	금액	116,904	79,738	37,166	-
2020	건수	11	3	8	-
	금액	41,677	1,685	39,992	-

수도과	9	제 목	하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 관련 계약 변경현황

-  해   당   사   항   없   음 -

수도과	10	제 목	상수도 관로 누수신고 및 처리현황

□ 상수관로 누수신고 및 처리현황

월별		상수관로 누수신고 현황	처리현황	비고
누계		1,451	1,451
2018년		536	536
2019년		468	468
2020년		447	447
	1월	45	45
	2월	30	30
	3월	28	28
	4월	44	44
	5월	60	60
	6월	46	46
	7월	44	44
	8월	38	38
	9월	56	56
	10월	56	56

【별첨 1】

보령시 위원회 현황

◎ 법령에 근거한 위원회

위원회명	설치근거 (법령, 조례, 규칙, 지침 등)	위원수(명)			위촉직 중 여성위원 수 (명/%)	위원회 기능			최근 2년간 회의개최 실적 (건수)	예산 집행액 (천원)	비고 (심의내용)
		계	당연직	위촉직
						의결	심의	자문
수돗물 평가위원회	○ 수도법 제30조 및 동법 시행령 제49조의 3 ○ 보령시 수돗물평가위원회 설치 및 운영에 관한 조례 제3조	15	1	14	(9/60)		○		1	700	수돗물 수질 검사계획 및 검사결과 공표(알림) 심의
성과평가위원회	○ 민간투자법 제 4조 2항 ○ 보령시 하수관거정비 임대형 민자사업 실시협약 제50조	10	1	9	(1/10)	○			7	4,594	BTL하수관거 관리, 운영, 유지부문에 대한 성과평가