2020. 11.

2020년도

행정사무감사자료

관  광  과

【 공통분야 】
2020 상반기 주요사업장 방문 시정(건의)사항 조치현황	6
행정심판 및 각종소송 추진상황(행정, 민사, 국가)	7
불허가 및 반려민원내역	7
민간행사보조금(위탁보조 포함), 민간경상사업보조, 민간단체 법정운영비보조 집행현황	8
민간자본보조금 예산 및 집행내역	9
보조금 집행 위반사항 및 조치(행정처분․고발 등) 현황	10
연구‧학술 용역비 예산 및 집행내역	10
민간인 해외여행 지원현황(2019-2020)	12
중앙(권익위 포함), 도, 자체감사 지적사항 처리결과(2018-2020)	12
중앙(권익위 포함), 도 이첩민원 처리사항(2018-2020)	12
각종 시설공사계획 및 추진실적	13
2018년도~2020년도 예산 중 불용‧전용 처리된 예산현황	14
사고이월, 명시이월, 계속비사업 추진현황(2천만원 이상)	14
국도비 요구 및 확보내역	15
특수시책 추진현황	23
민간위탁 기관 현황	23
보령시 각종 위원회 위원명부 및 예산액‧회의개최 실적(2019-2020)	24
민선7기 시장 공약사항 추진현황(예산 확보 계획 포함)	27
보령시 주요 공공시설 사용료부과징수 현황(2018-2020)	28
과태료 부과징수 현황	28
특별교부세 배정 및 사업 추진 현황(2018-2020)	28
2020년도 공모사업 현황(당초사업계획서, 신청서 첨부)	28
보령시 각종 축제 현황	29

각종 업무추진비 집행내역 및 지출결의서 사본(50만원 이상)	30
고가 첨단장비 보관 및 활용 현황(3천만원 이상)	30
CCTV 화소별 현황, 회선사용료, 시설장비유지비 집행내역(2018-2020)	30
각종 공사 3회 이상 설계변경 사업 현황(5천만원이상)	31
5천만원이상 공사 입찰잔액 현황 및 사용내역	31
주민참여감독제 추진 현황(3천만원 이상)	32
행정재산(건물) 보유 및 관리현황(청사제외)	32
각종 공무원 포상금 집행현황(2019~2020)	33
관용차 유류비 및 수선비 지급내역	33
각종 앱 개발 현황(2018-2020)	33
국도77호 개통에 따른 부서별 추진현황	33
의회 정책협의회 안건에 대한 부서의 진행상황과 결과	34
민간위탁사업 감사내역	35
각종 협약(MOU 등) 추진 현황	36
코로나19 사업비 집행내역	37
코로나19 발생에 따른 부서별 방역 대책 및 추진 현황	37
코로나19 각종 시설 사용료(공유재산 대부료 포함) 감면 현황 및 감면 기준	39
코로나19로 인한 각종 행사 취소 현황	40
코로나19 관련 집단 및 다중이용시설 등 관리현황	41

【 소관분야 】
□ 도심지 관광홍보판 관리용역 현황	43
□ 내포문화권 문화유적 정비사업 현황	43
□ 문화유적 발굴 추진현황	46
□ 성주산 남포오석 테마거리 조성사업 추진현황	47
□ 보령시 관광객 현황 및 유치실적(2018~2020)	50
□ 내륙관광 개발계획 및 추진현황	51

공  통  분  야

사업장시찰결과 시정(건의)사항 조치현황

사 업 명	시정(개선) 요구사항	조치현황
맨삽지 공룡 학성3리 창조적마을	❍ 주변관광지와 연계하여 학생 들이 많이 찾아올 수 있도록 보해주기 바람. ❍ 공룡발자국 발견장소, 역사성 등을 안내판 등을 활용하여 홍보 해 주기 바람. ❍ 두 시설이 같이 있는 만큼 관광객 편의를 위해 화장실, 주차장 설치 진입로 정비에 노력을 기해주기바람. ❍ 염생이 마을을 운영함에 있어서 청년회 회비 외에도 휴게음식사업 등 수익을 낼 수 있는 방안을 같이 강구해주기 바람.(도시재생과)	❍ 관광안내판. 관광지도, 관광홍보물 제작 시 홍보 ❍ SNS 등 홍보자료 업로드 ❍ “보령 학성리 공룡발자국화석(도 기념물 제193호)”과 관련하여 공룡조형물 전면에 안내판을 설치하여 홍보에 만전을 기하고 있음
천수만 해변트레킹 코스조성	❍ 천수만 낙조를 관광할 수 있도록 낙조사진, 전망대 등 시설을 보완 해주기 바람. ❍ 남은 코스는 자연공간을 보존 유지 하면서 조성해 주기 바람.	❍ 낙조 경관을 관람할 수 있는 전망대 및 포토존을 설치토록 반영하여 사업 추진 중에 있음. ❍ 자연훼손을 최소화하여 산림 보존 및 유지하도록 조성계획 하겠음.
성주산 낙조전망대	❍ 전망대 진입로가 협소하여 맞교행 문제, 버스 통행 불가 등 문제점이 있음. ❍ 관광자원을 활용할 수 있도록 진입로, 주차장 공간확보에 지속적으로 노력해주기 바람. ❍ 또한, 내륙관광사업 시 모노레일과 연계 할 수 있는 방안을 강구하기 바람. ❍ 시설 완공 후 주차장이 협소함을 알려 도보로 이동하여 관광할 수 있도록 미리 안내판을 설치하여 홍보해주기 바람.	❍ 진입로 정비공사를 추진 중에 있으며 1.0~1.5m 폭으로 확장예정임. ❍ 전망대 주차장 확보를 위해 공사 추진중으로 주차대수 15대 확보예정이며, 도유지확보로 주차장 도비 설치 예정임,. ❍ 내륙관광사업을 추진하면서 모노레일과 연계 방안을 검토하겠음 ❍ 진입로 초입에 안내판을 설치하여 도보로 이동할 수 있도록 하겠음.
보령축제관광 재단	❍ 머드축제는 전세계인이 참여하는 만큼 개최여부를 신중하게 결정하기 바람. ❍ 또한, 개최시 코로나 예방대책, 취소시에는 축제연기, 신규축제 개최 등 대안을 세워주기 바람. ❍ 또한, 축제 취소시 상인들의 경제적 타격이 예상되기 때문에 축제 이외에 지역경제가 활성화될 수 있도록 지역민을 위한 이벤트 등 다양한 대안을 모색해 주기바람. ❍ 코로나 19로 비대면 판매가 증가하는 추세에 맞춰 온라인 등 판매대책을 추진 하기 바람.	❍ 머드축제 개최 일정은 매년 9월에 당해년도 축제 결산보고회를 마치고 재단 이사회를 개최하여 차기년도 축제 일정을 다양한 토론과 심사숙고하여 최종 결정함. ❍ 23회 머드축제는 다양한 여론 수렴과 고심 끝에 온라인 축제로 결정하여 축제 방향성을 제시하고 홍보에 기여하여 내년도 머드축제와 2022박람회에 기대를 갖게 함.(총조회수160만) ❍ 12월중 코로나상황을 주시하여 겨울축제와 연계하여 해수욕장 지역에서 지역경제 활성화를 위한 빅이벤트 축제로 키워 개최 추진 예정. ❍ 재단 홈페이지를 전면 개편하면서 온라인판매 예정 (11월중 오픈예정)

행정심판 및 각종소송 추진상황

- 해당없음

불허가 및 반려 민원내역

민 원 명	신 청 인	불허가 및 반려 내용
기타유원시설업 신고	국군대천콘도	◦ 관련실과 관련법 검토결과 입지불가 → 해수욕장경영과: 신흑동 800-10번지에 놀이형시설(관광진흥법에 따른 기타유원시설업의 시설)은 대천해수욕장 관광지 조성계획의 지정용도(휴양콘도미니엄)에 포함되지 않으므로 입지 불가함.

민간행사보조금(위탁보조포함),민간경상사업보조

민간단체 법정운영비보조 집행현황

(단위: 백만 원)

연번	보조사업명	통계목	지원단체명	예산액	집행액 (지원액)	잔 액	비 고 (정 산)
계	17건			230,318	229,962	356
1	2020년도 전통한옥 브랜드화 사업	민간경상보조	이광명고택	11	11	-	추진중 (5~12월)
2	국내외 관광 홍보 박람회참가	민간행사보조	보령축제 관광재단	30	30	-	추진중 (2~12월)
3	대천조개구이 축제	민간행사 보조	(사)대천 관광협회	50	50	50	축제취소 (예산반납)
4	옛이야기투어	민간경상보조	(사)대천 관광협회	20,000	20,000	-	·코로나19 상황일시중지 (3~10월) ·사업재개 (11~12월)
5	원산도해수욕장 개장식	민간행사보조	오봉산 해수욕장 번영회	10,000	10,000	-	·행사취소 ·교부반납완료
6	관광객과 함께하는이벤트	민간행사보조	(사)대천 관광협회	10,000	10,000	-	·코로나19 상황일시중지 (3~10월) ·사업재개 (11~12월)
7	고대도 칼귀츨라프 선교 기념행사	민간행사보조	고대도 어촌계	10,000	9,738	262	·정산완료
8	무창포 해변예술제	민간행사보조	무창포 관광협의회	15,000	-	-	·행사취소
9	무창포신비의 바닷길 축제	민간행사보조	무창포신비의 바닷길축제추진위원회	150,000	-	-	·행사취소
10	원산도 한여름밤의 7080 해변콘서트	민간행사보조	(사)원산도 관광발전 협의회	15,000	-	-	·행사취소
11	향교 석전대제 및 서원 제향	민간행사 보조	향교, 서원	24	12	-	추진중 (11월 중)
12	김좌진장군 추모제향	민간행사 보조	보령문화원	5	-	5	사업포기
13	보령향교 프로듀서10003 (만세)	민간경상 보조	㈜미담문화콘텐츠연구소	83	83	-	추진중 (진행중)
14	충청수영성에서 들려오는뱃소리	민간경상 보조	㈜미담문화콘텐츠연구소	70	70	-	추진중 (12월)
15	보령시 향토유적 제향비 지원	민간행사 보조	집성당, 경순왕 영모전	6	3	-	추진중 (11월 중)
16	남포벼루 호남 특별전	민간행사 보조	(사)한국예총 보령지회	30	0	30	사업포기
17	외연도 풍어당제	민간행사 보조	외연도 풍어당제 추진위원회	9	0	9	사업포기

※ 제23회 보령머드축제 사업비(2,240백만 원)와 2019대천겨울바다사랑축제     사업비(250백만 원)는 출연금으로 지급

민간자본적보조금 예산 및 집행내역

(단위: 백만 원)

연번	보조 사업명	예산현황					집행액	잔액	비고
		계	국비	도비	시비	자담
계	8건	675	83	245	276	71	459	216
1	2019년 하반기 등록야영장 지원사업	37	15	-	11	11	37	0	명시 이월
2	2020년 등록야영장 지원사업(은행마을)	33	13		10	10	33	0
3	2020년 등록야영장 지원사업 (대천용두야영장)	24	10		7	7	22	2
								진행중
							0
						-
					150
				150
			-
		300
	대천해수욕장 친환경트램 (기차)구축사업
4
5	지방전통사찰보수정비(선림사 석축정비)	100	-	40	40	20	0	100	사업 진행중
6	전통사찰 방재시스템 구축사업(윤창암)	114	45	23	23	23	0	114	관련 부처 협의중
7	보령향교·서원기능보강지원	64	-	32	32	-	64	0
8	경순왕영모전 제례복및제구 구입지원	3	-	-	3	-	3	0

※ 친환경트램 구축사업: 장기계속사업┌2020년(1차): 300백만원(도 150, 시 150)

└2021년(2차): 250백만원(시 250)

보조금 집행 위반사항 및 조치(행정처분‧고발 등) 현황

- 해당없음

연구(정책용역 포함)․학술용역비 예산 및 집행내역

(단위: 백만 원)

용 역 명	예 산 액				집행액	잔 액	비 고
	계	국 비	도비	시 비
계	1,154	0	525	629	631	510
반려동물 동반여행 관광기반 확충 기본계획 수립용역	20	-	-	20	18	2	완료
2021년 계획공모형 관광개발사업 정부공모사업 준비용역	9	-	-	9	0	9	진행중
원산도 소록섬 스토리텔링 및 콘텐츠개발 용역	22	-	-	22	20	2	완료
관광 홍보 조형물 설치 개발용역	20	-	-	20			진행중
남포읍성 복원정비 시굴, 발굴조사	1,050	-	525	525	561	489	시굴조사 완료 발굴조사 추진중
보령갯벌 유네스코 세계유산 등재 예비타당성 조사(1차조사)	18	-	-	18	18		완료
무창포신비의 바닷길축제 프로그램개선	15	-	-	15	14	8	완료

*참고자료

용 역 명	용역기간	용역주요내용, 용역결과 시정반영사항, 공모선정여부 등
반려동물 동반여행 관광기반 확충 기본계획 수립용역	‘20. 5. 6. ~ ‘20. 9. 2.	◦ 반려동물 양육인구 1,000만 시대를 맞아 반려동물 동반 여행객들이 편하게 관광을 즐길 수 있는 신여가 문화 트렌드에 맞는 관광콘텐츠 개발을 위한 기본계획 수립
2021년 계획공모형 관광개발사업 정부공모사업 준비용역	‘20. 10. 21. ~‘20. 11.	◦ 보령시 관광산업의 활성화를 위한 지역의 관광개발 사업을 발굴, 타당성을 확보하여 문화체육관광부에서 추진하는 2021년 계획공모형 지역관광개발사업 신청 시 활용코자 함
원산도 소록섬 스토리텔링 및 콘텐츠개발 용역	‘20. 6. 5. ~ ‘20. 8. 3.	◦ 국도77호선 개통에 따른 원산도 소록섬 관광자원화를 위한 스토리텔링 및 관광콘텐츠 개발을 통해 소록섬 관광 자원화에 사용하고자 함
관광 홍보 조형물 설치 개발용역	‘20. 7. 24. ~	◦ 머드축제의 도시 보령의 시 브랜드 가치를 높이고 머드정체성을 담은 상징조형물 설치를 위한 조형물 디자인 및 위치선정에 활용코자함
남포읍성 복원정비 시굴, 발굴조사	(시굴) ‘20. 2. 26. ~ 7. 31. (발굴) ‘20. 9. 17. ~ `21. 8. 2.	◦ 노후 등에 따라 남포읍성 셩벽 보수 필요 ◦ 보수예정 구간의 정확한 규모 및 체성 축소 시기와의 선·후 관계 확인를 위한 시굴·발굴조사 ◦ 발굴된 성과를 활용하여 정확한 복원‧보수 자료 축적
보령갯벌 유네스코 세계유산 등재 예비타당성 조사 (1차조사)	‘19. 1. 15. ~ ‘19. 9. 11.	◦ 세계적으로 유명한 보령 갯벌의 유네스코 지정 타당성 확인을 위한 용역 ◦ 용역결과 갯벌의 우수성은 확인되나 유네스코 지정요건 충족치 못함
무창포신비의 바닷길축제 프로그램개선	20. 5. 10. ~ ‘20. 7. 17.	◦ 무창포 신비의 바닷길 축제의 개선된 프로그램 개발을 위한 용역 ◦ 2021년 무창포 축제 개최 시 개선된 프로그램이 반영될 수 있도록 예산 확보 예정

민간인 해외여행 지원현황(2019-2020)

- 해당없음

중앙(권익위 포함), 도, 자체감사 지적사항 처리결과(2018-2020)

< 2018년도>

감사 분야	제 목	시정 및 처리요구사항	조치결과(계획)
도감사	지역축제 안전관리 (재해대처) 대책 수립·심의 소홀	◦1천명 이상의 관람이 예상되는 공연 등 개최 시 관계 법령에 따라 재해대처계획을 수립토록 지도·감독 철저	◦2018년·2019년 축제 개최 시 안전관리계획 수립 및 심의를 득함
	축제보조금 집행에 따른 계약행위(협상계약) 지도·감독 소홀	◦보조사업자가 협상의 의한 계약 시 적합한 입찰공고를 통해 사업을 추진토록 지도·감독 철저	◦축제 추진을 위한 각종 용역 공고 시 시간을 준수하도록 지도

< 2019년도>

감사 분야	제 목	시정 및 처리요구사항	조치결과(계획)
자체 감사	<성주사지 중심사역 정비공사> 산업안전보건관리비 목적 외 사용 등 사후정산 소홀	◦안전관리 목적 외로 사용하거나 회수 청구 등으로 부당하게 지급된 245천원 회수	◦245천원 회수 완료 (‘18. 10. 1.) / 대흥환경웅진엔지니어링

< 2020년도>

해당없음

중앙(권익위 포함), 도 이첩민원 처리사항(2018-2020)

- 해당없음

각종 시설공사계획 및 추진실적(1억원이상)

번호	사 업 명	사업량	사업비	추 진 상 황	비 고
계	15건		16,002
1	성주산 남포오석 테마거리 조성사업	오석테마거리 조성 1식	1,600	- 3차년도 사업추진중 (2020.11.준공예정) 4차년도 사업추진중 (2021.12. 준공예정)	2016년 ~2020년
2	성주산 내륙산악관광자원개발사업	체험형 관광시설 조성1식	1,000	기본 및 실시설계용역중 (2020.12.준공예정)	2020년 ~2022년
3	보령머드 테마파크 조성사업	머드 테마파크 조성 1식	5,826	실시설계용역완료 -위탁개발추진중 (캠코/‘20.11.착공예정)	2019년 ~2021년
4	천수만해변 트레킹코스 조성사업	트레킹코스 조성 1식	850	2차년도 사업추진중 (2019.12.준공예정)	2018년 ~2020년
5	주산 벚꽃 관광자원화 사업	데크로드 설치 1식	1,000	사업완료(2020.9.14.)	2020년
6	보령댐 데크시설 설치사업	데크로드 설치 1식	200	1차년도 사업완료 (2020.10.16.)	2020년 ~2021년
7	보령댐 조망둘레길 조성사업	데크로드 설치 1식	300	사업완료(2020.4.27.)	2020년
8	외연도 가고싶은섬 둘레길 보수사업	데크시설 보수 1식	300	사업완료(2020.10.15.)	2020년
9	외연도 상록수림 식생정비 및 후계목 조성	1식	200	사업완료(2020. 10.)
10	성주사지 홍보관 구축사업 신축공사 (건축, 2020년도분)	건축 1식	1,403	공사진행중 (2021. 3. 준공 예정, 현재 공정률 27%)
11	성주사지 홍보관 구축사업 신축공사 (전기)		163
12	성주사지 홍보관 구축사업 신축공사 (소방)		167
13	보령 충정공 이시방 신도비 보호각 설치	보호각 설치 1식	133	공사진행중 (2020.12.준공예정)
14	토정비결 체험관 건립 (실시설계)	1식	540	기본 및 실시설계 용역 진행중(공정률 20%) (선금 )	2019년
15	토정비결 체험관 건립 (공사비)	1식	2,320	기본 및 실시설계 용역 지연으로 인한 공사추진 불가	2020년

2018~2020년도 예산 중 불용․전용 처리된 예산현황

- 해당없음

사고이월, 명시이월, 계속비사업 추진현황 (2천만원 이상)

(단위: 백만 원)

연번	사 업 명	사업내용 (사업량)	이월사업비 (계약금액)	이월사유	집행액	추진현황	비고
계	7건		5,214		1,632
1	성주산 남포오석 테마거리 조성사업	오석테마거리 조성 1식	1,420	절대공기 부족	247	추진중 (11월 준공예정)	명시
2	천수만 해변트레킹코스 조성사업	트레킹코스 조성 1식	196	절대공기 부족	191	완료	명시
3	보령머드 테마파크 조성	머드 테마파크 조성 1식	193	절대공기 부족	193	완료	명시
4	보령댐 주변 공공기반시설 조성	공공기반시설조성 1식	84	절대공기 부족	75	완료	명시
5	내포문화권유적정비	문화재 발굴 조사	110	절대공기 부족	110	완료	명시
6	토정비결 체험관 건립	토정비결 체험관 건립	540	절대공기 부족	294	설계중	명시
7	성주사지 홍보관 구축 사업	홍보관 구축	2,671	연차사업	522	진행중	계속비 (~2021)

국도비 요구 및 확보내역

▢ 요구 및 확보(2018년~2020년)

(단위: 백만 원)

구분	총 사업건수	확 보 총 액
		계	국비	도비	시비
2018	19건	5,326	2468.5	500	2357.5
2019	30건	4,601	1,968	497	2,135
2020	53건	19,058	1,742	7,176	10,138

▢ 요구 및 확보(2020년)

(단위: 백만 원)

연번	사 업 명	요 구 액				확 보 액
		계	국 비	도 비	시비	계	국 비	도 비	시비
계	54건	27,034	2,985.8	10,763.1	13,285.1	19,142.1	1,814.5	7,176.9	10,150.7
1	성주산 남포오석 테마거리 조성사업	1,630	-	815	815	1,630	-	815	815
2	보령머드 테마파크 조성사업	7,850	-	3,925	3,925	5,826	-	2,913	2,913
3	성주산 내륙산악관광 자원개발	1,000	-	500	500	1,000	-	500	500
4	주산 벚꽃 관광자원화사업	1,000	-	500	500	1,000	-	500	500
5	천수만 해변 트레킹코스조성사업	850	-	425	425	850	-	425	425
6	보령댐 조망 둘레길 조성	300	-	150	150	300	-	150	150
7	보령댐 데크시설 설치	200	-	100	100	200	-	100	100
8	2020년도 전통한옥 브랜드화 사업	10	5	-	5	10	5	-	5
9	2020년 등록야영장 지원사업(은행마을)	23	13	-	10	23	13	-	10
10	2020년 등록야영장 지원사업(대천용두야영장)	17	10	-	7	17	10	-	7
11	2021년도 관광택시	30		9	21	30		9	21
12	관광지 방역·수용태세 개선지원 사업	72	72	0	0	72	72	0	0
13	관광상품 개발 및 온라인 마케팅	20	-	10	10	20	0	10	10
14	보령머드축제(보조)	2,640	100	300	2,240	2,340.8	100	0.8	2,240
15	문화재 보수정비(총액계상) (성주사지 방재시설 유지관리)	4	2.8	0.6	0.6	4	2.8	0.6	0.6
16	문화재 보수정비(총액계상) (성주사지 사적정비 종합계획 수립)	50	35	7.5	7.5	-	-	-	-
17	문화재 보수정비(총액계상) (성주사지 삼천불전지 정비)	200	140	30	30	-	-	-	-
18	문화재 보수정비(총액계상) (성주사지 예초)	20	14	3	3	20	14	3	3
19	문화재 보수정비(총액계상) (충청수영성 서문 해체보수 및 시·발굴조사)	500	350	75	75	-	-	-	-
20	문화재 보수정비(총액계상) (충청수영성 탐방로 정비)	550	385	82.5	82.5	-	-	-	-
21	문화재 보수정비(총액계상) (충청수영성 예초)	30	21	4.5	4.5	30	21	4.5	4.5
22	문화재 보수정비(총액계상) (성주사지 오층석탑 보존처리)	100	70	15	15	70	49	10.5	10.5
23	문화재 보수정비(총액계상) (외연도 상록수림 식생정비)	200	140	30	30	200	140	30	30
24	문화재 보수정비 (총액계상) (외연도 상록수림 토지매입)	100	70	15	15	100	70	15	15
25	문화재 보수정비 (총액계상) (외연도 상록수림 상시관리)	30	21	4.5	4.5	30	21	4.5	4.5
26	문화재 보수정비 (총액계상) (외연도 풍어당제 지원)	10	7	1.5	1.5	9.3	6.5	0.8	2
27	문화유산관광자원개발(성주사지 홍보관)	3,300		1,650	1,650	700		350	350
28	도지정문화재 보수정비 (신경섭가옥 담장보수)	46	-	23	23	46	-	23	23
29	도지정문화재 보수정비 (화암서원 제기고 기둥보수)	30	-	15	15	30	-	15	15
30	도지정문화재 보수정비 (용암영당 외삼문, 문충재 보수)	72	-	36	36	72	-	36	36
31	도지정문화재 보수정비 (남포향교 제기고, 내삼문 보수)	154	-	77	77	70	-	35	35
32	도지정문화재 보수정비 (보령원홍주등 6군 상무 사임소 서까래 보수)	114	-	57	57	-	-	-	-
33	도지정문화재 보수정비 (신경섭가옥 방충)	30	-	15	15	30	-	15	15
34	도지정문화재 보수정비 (남포관아문 방충)	36	-	18	18	36	-	18	18
35	도지정문화재 보수정비 (보령원홍주등6군 상무소 임소 방충)	14	-	7	7	14	-	7	7
									15
								15
							-
						30
					15
				15
			-
		30
	도지정문화재 보수정비 (남포향교 방충)
36
									22
								22
							-
						44
					22
				22
			-
		44
	도지정문화재 보수정비 (보령향교 방충)
37
38	충효열시설물 보수정비 (효자 임은모 정려각 지붕보수)	18	-	9	9	18	-	9	9
39	도지정문화재 방재시설 보수 (남포관아문 외 7개)	70	-	35	35	20	-	10	10
40	충청남도 거점육성형 지역개발 (남포읍성 성곽정비)	1,960	-	980	980	1,560	-	780	780
41	충청남도 거점육성형 지역개발 (남포읍성 시굴· 발굴조사)	560	-	280	280
42	지역문화유산교육	100	50	25	25	-	-	-	-
43	생생문화재 활용사업 (충청수영성에서 들려오는 뱃소리)	150	50	50	50	70	28	21	21
44	향교·서원 문화재 활용 (보령향교 프로듀서 10003)	100	40	30	30	82.5	33	24.7	24.8
45	문화재 안내판 정비 (성주사지 동삼층석탑 외 3건)	14	7	3.5	3.5	10.2	6.2	2	2
46	전통사찰 방재시스템 구축 (윤창암)	112	56	28	28	91	45.5	22.7	22.8
47	도지정문화재 도로 표지판 정비 (남포벼루 제작)	4	-	1	3	5	-	1.5	3.5
48	자연유산민속행사 (외연도 풍어당제 지원)	10	7	1.5	1.5	9.3	6.5	0.8	2
49	전통사찰 보수정비 (선림사 석축정비)	267	133	67	67	80	-	40	40
50	전통사찰 보수정비 (중대암 기단 및 배수로 정비)	160	80	40	40	-	-	-	-
51	전통사찰 보수정비 (백운사 산신각 건립)	132	66	33	33	-	-	-	-
52	전통사찰 보수정비 (윤창암 법당 해체보수)	213	107	53	53	-	-	-	-
									5.5
								5.5
							11
						22
					7
				7
			14
		28
	전통사찰 방재시스템 유지·보수
53
								232	928
							1,160
						2,320
					728
				182
			920
		1,830
	충청유교문화권 광역관광개발 (토정비결체험관 건립)
54

▢ 요구내역(2021년)

(단위: 백만 원)

연번	사 업 명	요 구 액				확 보 액
		계	국 비	도 비	시 비	계	국 비	도 비	시 비
계	47건	30,013	2,935.6	13,138	13,923.2	25,489.8	1,972.6	11,340.7	12,535.6
1	보령 머드테마파크 조성사업	9,874	-	4,937	4,937	9,874	-	4,937	4,937
2	성주산 내륙산악관광 자원개발사업	7,700	-	3,850	3,850	7,700	-	3,850	3,850
3	보령댐 데크시설 설치	1,600	-	800	800	1,600	-	680	920
4	관광지 방역·수용태세 개선지원 사업	72	72	0	0	72	72	0	0
5	문화재 보수정비(총액계상) (성주사지 방재시설 유지관리)	4	2.8	0.6	0.6	4	2.8	0.6	0.6
6	문화재보수정비 (총액계상)사업 (보령 성주사지 낭혜화상탑비 보존처리)	12	8	2	2	12	8	2	2
7	문화재보수정비 (총액계상)사업 (보령 성주사지 낭혜화상탑비 보호각 및 주변정비)	150	105	22	23	100	70	15	15
8	문화재보수정비 (총액계상)사업 (보령 성주사지 오층석탑 보호책 교체 및 잔디제거)	12	8	2	2	12	8	2	2
9	문화재보수정비 (총액계상)사업 (보령 성주사지 동 삼층석탑 보호책 교체 및 잔디제거)	12	8	2	2	12	8	2	2
10	문화재보수정비 (총액계상)사업 (보령 성주사지 중앙 삼층석탑 보호책 교체 및 잔디제거)	12	8	2	2	12	8	2	2
11	문화재보수정비 (총액계상)사업 (보령 성주사지 서 삼층석탑 보호책 교체 및 잔디제거)	12	8	2	2	12	8	2	2
12	문화재보수정비 (총액계상)사업 (보령 성주사지 예초작업)	27	21	3	3	20	14	3	3
13	문화재보수정비 (총액계상)사업 (보령 충청수영성 예초작업)	60	42	9	9	30	21	4	5
14	문화재보수정비 (총액계상)사업 (보령 충청수영성 남서치성 1 정밀발굴조사)	450	315	67	68	0	0	0	0
15	문화재보수정비 (총액계상)사업 (보령 충청수영성 동벽 정밀발굴조사)	450	315	67	68	0	0	0	0
16	문화재보수정비 (총액계상)사업 (보령 외연도 상록수림 식생정비 및 후계목 조성)	100	70	15	15	100	70	15	15
17	문화재보수정비 (총액계상)사업 (보령 외연도 상록수림 천연기념물(식물)보수 치료)	30	21	4	5	30	21	4	5
18	문화유산관광자원(성주사지홍보관)	2,600	-	1,300	1,300	1,800	-	900	900
19	문화유산관광자원 (비림공원조성)	1500	-	750	750	-	-	-	-
20	문화유산관광자원 (충청수영해상공원)	300	-	150	150	300	-	150	150
21	전통사찰 보수정비 (선림사 원통전 단청)	180	90	45	45	180	90	45	45
22	전통사찰 보수정비 (중대암 인법당 기단 및 법단 계단 보수)	160	80	40	40	150	75	37.5	37.5
23	전통사찰 보수정비 (백운사 무염당 이축)	173	87	43	43	-	-	-	-
24	전통사찰 보수정비 (윤창암 법당 해체보수)	240	120	60	60	-	-	-	-
25	전통사찰 방재시트템구축 (백운사)	120	60	30	30	103	51	26	26
26	전통사찰 방재시트템구축 (중대암)	104	52	26	26	96	48	24	24
27	전통사찰 방재시스템구축 (선림사)	76	38	19	19	76	38	19	19
28	전통사찰 방재시스템 유지보수	24	12	6	6	22	11	5	6
29	충청유교문화권 광역관광개발 (토정비결체험관 건립)	2,600	1,300	260	1,040	2,600	1,300	260	1,040
30	도지정문화재 보수정비 (남포향교 대성전, 내삼문 보수)	150	-	75	75	150		75	75
31	도지정문화재 보수정비 (보령향교 대성전 안전진단)	70	-	35	35	-	-	-	-
32	도지정문화재 보수정비 (보령 관아문 단청)	90	-	45	45	-	-	-	-
33	도지정문화재 보수정비 (보령 수부리 귀부 및 이수 보존처리)	20	-	10	10	25	-	12.5	12.5
34	도지정문화재 보수정비 (대천 왕대사 마애불 보존처리)	120	-	60	60	50	-	25	25
35	도지정문화재 보수정비 (용암영당 삼은당 및 외삼문 단청)	150	-	75	75	-	-	-	-
36	도지정문화재 보수정비 (신경섭가옥 안채 우측면 보수)	20	-	10	10	20	-	10	10
37	도지정문화재 보수정비 (남포읍성 주변 토지매입)	120	-	60	60	120	-	60	60
38	도지정문화재 보수정비 (보령 경찰서 망루 안전진단)	30	-	15	15	-	-	-	-
39	도지정문화재 보수정비 (보령 산수동 소나무 주변정비)	12	-	6	6	12	-	6	6
40	도지정문화재 보수정비 (화암서원 강륜당 단청)	40	-	20	20	-	-	-	-
41	도지정문화재 보수정비 (보령 원홍주 등 6군 상무사 임소 담장철거)	120	-	60	60	75	-	37.5	37.5
42	도지정문화재 보수정비 (백운사 인법전 주변정비)	170	-	85	85	-	-	-	-
43	자연유산 민속행사 (외연도 풍어당제 지원)	1	0.7	0.1	0.2	1	0.7	0.1	0.2
44	생생문화재 활용사업(충청수영성, 푸른바다의 전설)	125	50	37.5	37.5	50	20	9	21
45	향교·서원 문화재 활용 (보령향교 프로듀서 10003)	100	40	30	30	65	26	11,7	27,3
46	문화재 안내판 정비 (보령청소역)	3	2.1	0.3	0.6	3	2.1	3	6
47	도지정문화재 도로표지판 정비 (보령유격장군창덕비)	1,8	-	0.5	1.3	1.8	-	0.5	1.3

특수시책 추진현황

- 해당없음

민간위탁 기관 현황

사업명	위탁기관	위탁기간	모집방법	위탁사업비 (백만 원)	비 고
계	2건			1,592.5
머드박물관 관리 운영	(재)보령축제관광재단	‘18. 7. 1.~ ‘21. 6. 30.	보령축제관광재단 설립 및 지원조례에 따른 수의계약	42.5
머드화장품 사업 운영	(재)보령축제관광재단	‘19. 1. 17.~ ‘22. 1. 16.	보령축제관광재단 설립 및 지원조례에 따른 수의계약	1,550

보령시 각종 위원회 위원명부(성별표시) 및 예산액 ․ 회의개최실적 (2018-2019)

보령시 위원회 현황

◎ 위원회 현황

위원회명	설치근거 (법령, 조례, 규칙, 지침 등)	위원수(명)			위촉직 중 여성위원 수 (명/%)	위원회 기능			최근 2년간 회의개최 실적 (건수)	예산 집행액 (천원)	비고 (심의내용)
		계	당연직	위촉직
						의결	심의	자문
보령시 문화관광해설사 배치심사위원회	보령시 각종 위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례	4	2	2	1명/50%	○	○		1건	-	문화관광해설사 해설사 배치여부
보령머드세계화 추진위원회	보령머드세계화추진 위원회 운영조례	16	3	13	4명/30%			○	0	0	미 개최
향토문화유산 보호 위원회	보령시 향토유적 보호 조례	7	1	6	1명/14%	○	○	○	1건	714	향토유적의 지정과 해제, 향토 유적 보호구역 지정, 해제 심의
관광숙박업 등의 등록심의 위원회	관광진흥법	7	7	-	1명/14%	○	○		0건	0	관광숙박업 및 관광객 이용시설업 등록기준 등 적합 여부

◎ 위원회 명단

❍ 관광숙박업 등의 등록심의 위원회

연번	소속 및 직위	성 명	위원 성격	비 고
1	보령시 부시장	정낙춘	당연직	위 원 장
2	보령시 해양수산관광국장	한상범	〃	부위원장
3	보령시 교육체육과장	김선미	〃
4	보령시 지역경제과장	이선규	〃
5	보령시 관광과장	오제은	〃
6	보령시 보건행정과장	한건수	〃
7	보령시 농업정책과장	맹진영	〃

❍ 보령머드세계화추진위원회

연번	소속 및 직위	성 명	위원 성격	비 고 (위촉횟수)
1	보 령 시 장	김동일	당연직	*위 원 장
2	前)국회의원(94 대천시장)	박상돈	위촉직	*고 문(6)
3	배재대학교(관광이벤트 연구소장)	정강환	위촉직	*부위원장(6)
4	보령시의회의원	김정훈	위촉직	(1)
5	보령시의회의원	권승현	위촉직(여성)	(1)
6	보령축제관광재단 대표이사	조태현	위촉직	(1)
7	우송대학교 화장품학과 석좌교수	안정림	위촉직	(6)
8	코스맥스(주) 마케팅본부 상부	김철희	위촉직	(1)
9	충남도립대학교(뷰티코디네이션과 교수)	류지원	위촉직(여성)	(6)
10	충남도립대학교(뷰티코디네이션과 교수)	임효순	위촉직(여성)	(6)
11	팡고코리아대표	복미경	위촉직(여성)	(1)
12	㈜보령머드코리아	이배철	위촉직	(6)
13	보령시 前 총무국장	명희철	위촉직	(1)
14	국제인그리에협회장(에코바이오의학연구소대표)	구태규	위촉직	(1)
15	해양수산관광국장	한상범	당연직	(1)
16	관광과장	오제은	당연직	(1)

❍ 향토유적보호위원회

연번	소속 및 직위	성 명	주요경력	위원 성격	비 고 (위촉횟수)
1	위원장	정낙춘	남	재직기간	당연직
2	위 원	진상철	남	2년	2019. 4. 30.
3	위 원	서현주	여	2년	2019. 4. 30.
4	위 원	민정희	남	2년	2019. 4. 30.
5	위 원	신재완	남	2년	2019. 4. 30.
6	위 원	구본태	남	2년	2019. 4. 30.
7	위 원	황의천	남	2년	2019. 4. 30.
8	간 사	오제은	남	재직기간	당연직

❍ 문화관광해설사 배치심사위원회

연번	소속 및 직위	성 명	위원 성격	비 고 (위촉횟수)
1	청운대학교 관광경영학과 교수	최인호	위촉직	(6)
2	한남대 교양영어부교수	신명희	위촉직/여성	(3)
3	자치행정과장	여장현	당연직	임명
4	관광과장	이선규	당연직	임명

국민선7기 시장 공약사항 추진현황(예산확보계획 포함)

1. 성주산 낙조전망대 설치

◇ 랜드마크형 낙조전망대를 성주산 남포오석 테마거리와 연계 추진

◇ 주변 관광자원이 풍부한 성주산에 내륙관광자원을 확충하여 지역      균형 발전 및 지역경제 활성화 도모

▢ 사업개요

○ 위    치: 성주면 개화리 114-22번지 일원(패러글라이딩 활공장)

○ 사업내용: 낙조전망대(B=25m, H=6m) 1식, 화장실 1식

○ 사 업 비: 금1,136,412천원(도급 815,383천원, 관급 321,029천원)

○ 사업기간: 2019. 11. 27. ~ 2020. 7. 8.(7. 3. 일시정지)

○ 도 급 자: 동광건설(주) 대표 이기홍

▢ 추진상황

○ 2019.  4. 18.: 낙조전망대 디자인용역 완료

○ 2019.  9.  4.: 도유림 교환토지 등기이전 완료

○ 2019. 11. 12.: 실시설계용역 완료

○ 2019. 11. 27.: 공사 착공

○ 2020.  6. 23.: 기성검사(1차) 실시

○ 2020.  7.  3.: 공사일시정지(설계변경 기간소요)

○ 2020.  11.: 공사 준공 예정

▢ 조 감 도

보령시 주요 공공시설 사용료부과징수 현황

- 해당없음

과태료 부과 징수 현황

- 해당없음

특별교부세 배정 및 사업 추진 현황(2018-2020)

- 해당없음

2020년도 공모사업 현황

(단위: 백만 원)

연번	사 업 명	총 사 업 비
		계	국비	도비	시비	자부담
계	7건	572.5	341	45.7	165.8	20
1	2020년 K-POP 콘서트개최 지원사업	100	100	-	0	0
2	2020년 지역관광 추진조직(DMO) 육성지원사업	250	150	-	100	0
3	2020년 등록야영장 지원사업(은행마을)	33	13		10	10
4	2020년 등록야영장 지원사업 (대천용두야영장)	24	10		7	7
5	2020년도 전통한옥 브랜드화 사업	13	7		3	3
6	생생문화재활용사업 (충청수영성에서 들려오는뱃소리)	70	28	21	21
7	향교·서원 문화재 활용 (보령향교 프로듀서 10003)	82.5	33	24.7	24.8

보령시 각종 축제 현황

[2019년]

연번	부서명	축 제 명	기 간	장 소	주요내용	참석 인원 (천명)	보험가입여부	안전관리심의여부	비 고
1	관광과	제22회 보령머드 축제	7.19.~7.28. (10일간)	대천해수욕장 일원	머드체험행사 등 65개 프로그램	1,811	여	여
2	관광과	제21회 무창포 신비의바닷길 축제	8.30.~9.1. (3일간)	무창포해수 욕장일원	신비의바닷길 체험행사 등	148	여	여

[2020년]

연번	부서명	축 제 명	기 간	장 소	주요내용	누적조회 (천명)	보험가입여부	안전관리심의여부	비 고
1	관광과	제23회 온라인 보령머드축제	7.17.~7.26. (10일간)	대천해수욕장 일원	머드TV 유튜브 등 4개 분야 11개 프로그램	1,603	여	여

각종 업무추진비 집행내역 및 지출결의서 사본

- 해당없음

고가 첨단장비 보관 및 활용현황(3천만원이상)

- 해당없음

CCTV화소별 현황,회선사용료,시설장비

유지비 집행내역(2018-2020)

▢ CCTV 화소별 현황

연번	구 분	수 량	화 소 수	비 고
계	7건	18
1	성주사지 낭혜화상탑비	2	300만 화소	2013년 구입
2	성주사지	5	200만 화소	2014‧2018년 구입
3	남포관아문	3	200만 화소	2014년 구입
4	남포향교	1	200만 화소	2014년 구입
5	보령향교	3	200만 화소	2014년 구입
6	충청수영 장교청	2	200만 화소	2014년 구입
7	충청수영 내삼문	2	200만 화소	2014년 구입

▢ 회선 사용료                              (단위: 백만 원)

연도별	사용료	비 고
계	126
2017년	42
2018년	42
2019년	42

▢ 시설장비유지비: 없음

각종공사3회 이상 설계변경 사업현황

- 해당없음

5천만원이상 공사 입찰잔액 현황 및 사용내역

(단위: 백만 원)

연번	공 사 명	발주금액	계약금액	입찰잔액	사 용 내 역	비고
계	18	3,221	2,792	429
1	2019 성주산 남포오석 테마거리 조성사업(낙조전망대)	942	815	127	-	추진중
2	성주산 남포오석 테마거리 조성 (전망대 진입도로 정비)	93	55	38	-	추진중
3	성주산 남포오석 테마거리 조성 (전망대 주차장 조성)	307	267	40	-	추진중
4	2020 성주산 남포오석 테머거리 조성(옥마폭포)	176	153	23	-	추진중
5	천수만 해변 트레킹코스 조성사업	845	746	99	-	추진중
6	주산벚꽃 관광자원화 사업(조경)	138	121	17	12백만원 (현장여건 및 주민건의 반영을 위한 설계변경)	완료
7	주산벚꽃 관광자원화 사업(경관조명)	236	211	25	-	완료
8	보령댐 데크시설 설치사업	63	55	8	3백만원 (현장여건에 따른 설계변경)	완료
9	보령댐 조망둘레길 조성사업	165	143	22	21백만원 (현장여건 및 주민건의 반영을 위한 설계변경)	완료
10	외연도 가고싶은섬 둘레길 보수사업	196	174	22	22백만원 (현장여건에 따른 설계변경)	완료
11	용암영당 외삼문 및 문충재 보수	60	52	8	8백만 원 (집행잔액 활용 설계변경)	완료

연번	공 사 명	발주금액	계약금액	입찰잔액	사 용 내 역	비고
12	남포향교 외삼문 기둥 보수 및 제기고 해체보수	60	52	8	8백만 원 (집행잔액 활용 설계변경)	완료
13	보령 충정공 이시방 신도비 보호각 설치	153	133	20	-	진행중
14	외연도 상록수림 식생정비 및 후계목 조성	188	167	21	-	완료
15	성주사지 오층석탑 모니터링 및 보존처리	54	48	6	6백만 원 (집행잔액 활용 설계변경)	진행중
16	성주사지 홍보관 구축사업 신축공사(건축)	1655	1406	249	-	진행중
17	성주사지 홍보관 구축사업 신축공사(전기)	187	163	24	-	진행중
18	성주사지 홍보관 구축사업 신축공사(소방)	189	167	22	-	진행중

주민참여감독제 추진 현황(3천만원이상)

- 해당없음

행정재산(건물)보유 및 관리현황(청사제외)

(단위: 백만 원)

연번	구분 (사용허가/위탁/무상/기타)	시설명	소재지	시설규모		사용자	사용 내역	사용 기간	사용료	비고
				층수	면적
계		3건
1	사용허가	갯벌체험장 창고	신흑동 521	지상 1층	99.28㎡	군헌 어촌계	창고	2020.4.20.~2021.4.19.	2
2	위탁	보령머드화장품	주포면 관산리 320-21	지상 2층	3,051㎡	보령시	공장	3년(2019.1.17.~2022.1.16.)
3	위탁	머드 박물관	보령시 대해로 897-15	지하1, 지상2	1,917㎡	(재)보령머드축제조직위원회	박물관	3년(2018.7.1.~2021.6.31.)

각종 공무원 포상금 집행현황(2019-2020)

- 해당없음

관용차 유류비 및 수선비 지급내역

- 해당없음

각종 앱 개발 현황(2018~2020)

- 해당없음

국도77호 개통에 따른 부서별 추진현황

▢ 관광홍보판 신규설치 사업

○ 위    치: 오천면 원산도리 산3-2번지 일원(원산안면대교 진입부)

○ 사업기간: 2020. 9. 9. ~ 2020. 9. 25.

○ 사 업 량: 관광홍보안내판 신규 설치 1식

○ 사 업 비: 19,350천만 원

○ 추진현황: 2020. 8.19. ~ 9.25./ 설치완료

▢ 설치사진

의회 정책협의회 안건에 대한 부서의 진행상황과 결과

안 건 명	진행상황 및 결과
대천해수욕장 친환경트램 구축사업 (2020. 4. 27.)	▢ 사업개요 ○ 사업기간: 2020. 4. ~ 2021. 4. ○ 위 치: 대천해수욕장 일원 ○ 사 업 비: 550백만 원 * 장기계속사업┌ 2020년(1차) 300백만원(도비 150, 시비 150) └ 2021년(2차) 250백만원(시비 250) ○ 사 업 량: 친환경트램 1량(동력차 1, 객차 3) ▢ 추진상황 ○ 2020. 04. 02.: 친환경트램 구축사업 운영계획 수립 - 친환경트램 안전운행계획 수립 및 보령경찰서 사전협의 완료 ○ 2020. 06. 10.: 국토교통부 친환경트램 특례 인정 ○ 2020. 06. 17.: 보조금 교부결정(보령축제관광재단) ○ 2020. 07. 29.: 조달청 협상에 의한 계약 대행요청 ○ 2020. 09. 25.: 협상에 의한 계약체결(착수신고)

민간위탁사업 감사내역(2018~2020)

1. 2020년 위탁사무 운영실태 지도·점검

◇ (재)보령축제관광재단의 위탁사무(보령머드박물관 관리 및 보령머드화장품 사업) 재정, 인사, 시설 등 전반적인 운영실태 지도·점검 추진

▢ 점검개요

○ 점검기간: 2020. 3. 16.(월) ~ 3. 30.(월) / 11일간

○ 점검대상: (재)보령축제관광재단 위탁사무

- 보령머드박물관 관리운영 위탁, 보령머드화장품 사업운영 위탁

○ 점검범위: 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31. / 1년

○ 점 검 자: 관광진흥팀장 외 1인

○ 점검내용: (재)보령축제관광재단 위탁사업 운영실태 전반

▢ 점검결과

○ 행정상 조치: 77건(시정 65건, 주의 12건)

○ 재정상 지적사항: 발견하지 못함

○ 신분상 조치: 0건/0명

▢ 조치결과

○ 지적사항 77건 조치완료

의회 각종 협약(MOU 등) 추진 현황(2018~2020)

협 약 명	협 약 일	협약기관	내 용
서울-타시도 연계 버스자유여행상품 공동추진업무협약	2020. 2. 7.	-서울특별시 -타 지자체 -한국관광공사	서울시-타시도 연계 버스자유여행상품 운영 추진 - 서울시: 사업총괄, 운영여행사공모․선정,홍보마케팅 - 보령시: 코스개발, 공동 홍보, 홍보비 지원 등 - 한국관광공사: 홍보마케팅 지원 등 - 전담여행사: 상품운영, 모객 등
지역축제 챗봇 서비스 협약	2020. 3. 25.	-한국정보화진흥원-보령시	민간주도형 전자정부서비스시범사업*을 원활하게 추진하기 위해 필요한 협약 체결 * 지역축제 챗봇: 축제 관련 자동채팅응답 시스템
원산도 해양문화유산조사	2020. 6. 10.	-국립해양문화재 연구소 보령시	협약기간: 2020. 6. 10. ~ 2026. 6. 10.(5년) 사업내용: 원산도 해양문화유산 학술공동조사(민속, 문화, 역사, 인물 등) 협약내용 ·해양문화유산 조사연구와 활용에 관한 사항 ·양 기관의 조사연구를 위한 정보 규류에 관한 사항 ·학술행사 등 공동개최 및 후원에 관한 사항 ·기타 협약목적에 부합하다고 판단되는 사항

코로나19 사업비 집행내역

사 업 명	기 간	장 소	사업비	사업내용
코로나19 관련 관광사업체 등 방역약품 지원	2020. 6.~12.	·관광사업체 (100여개소) ·전통사찰 (10개소)	9,900천원	·관광사업체 및 전통사찰 방역약품 배부 (손소독제, 소독약품)
관광지 방역·수용태세 개선지원 사업	2020. 10.~ 12.	·석탄박물관 ·스카이바이크 ·용두해수욕장 근로자종합복지관 야영장 ·보령시읍면동 주요관광지점	72,000천원	·가을 행락철 야외활동 증가에 따른 보령 주요관광지점 방역 강화를 위한 인건비 및 운영비
자연유원지 방역 사업	2020.7.~8.	·8개 읍·면 17개 유원지 (20개소)	90,320천원	·자연발생유원지 관광객 발열체크 및 손목밴드 배부

코로나19 발생에 따른 부서별 방역 대책 및 추진현황

1. 관광사업체 거리두기 점검

▢ 사업개요

○ 점검기간: 2020. 5. 12. ~ 현재

○ 점검대상: 관광사업체 86개소

- 관광지 3, 관광숙박업5, 관광펜션업 45, 야영장업 19, 유원시설업 12, 관광유람선업 1

○ 점검내용: 거리두기 방역지침 준수 여부

- 근무자 마스크 착용, 손소독제 비치 및 소독·환기

- 출입자명부·소독일지·종사자대장 작성 및 감염관리책임자 지정

- 중위험시설(워터파크) 이용자 간 2m(최소 1m) 간격 유지

2. 코로나19 관련 관광사업체 등 방역약품 지원

▢ 사업개요

○ 사 업 명: 코로나19 관련 관광사업체 등 방역약품 지원

○ 사업기간: 2020. 6. ~ 12.

○ 사업대상: 관광사업체 100여개소, 전통사찰 10개소

○ 사 업 비: 9,900천원(시비)

○ 사업내용: 관광사업체 및 전통사찰 손소독제, 소독약품 배부(손소독제 1200개, 소독약품 600개)

3. 관광지 방역·수용태세 개선지원

▢ 사업개요

○ 사 업 명: 관광지 방역·수용태세 개선지원

○ 사업기간:‘20. 10월 ~ 12월

○ 대 상 지: 석탄박물관, 용두해수욕장 근로자종합복지관 야영장,                      스카이바이크, 보령시 읍·면 ‧동 자연발생유원지 7개소

○ 사 업 비: 72,000천원(국비 100% / 자치단체경상보조)

○ 사업내용: 코로나19 확진자 수 하락세 및 휴관 관광지 개관                  예상에 따른 관광지 방역 선제적 조치

4. 자연발생유원지 방역 추진

▢ 사업개요

○ 사 업 명: 자연발생유원지 방역 추진

○ 사업기간:‘20. 7. 3. ~ 8. 23.

○ 대 상 지: 8개 읍·면 17개 유원지 내 20개소                           【독산/용두/원산도/오봉산/사창/염성해변, 백재계곡, 화산천 생태공원, 물빛공원,

심원동/먹방/조계골계곡, 명대계곡, 충청 수영성, 죽도, 용두, 냉풍욕장】

○ 운영체계: 총괄반(1), 관리반(3), 실행반(6)

○ 사 업 비: 90,320천원

○ 사업내용

- 본격적 여름 휴가철을 맞아 코로나19로부터 청정보령을 지키고

- 자연발생유원지 검역소를 설치하여 입장객 관리를 통한 방역 대책 마련

5. 전통사찰 및 향교·서원 코로나 방역 점검

▢ 사업개요

○ 기   간: 2020. 2월～계속

○ 기   관

-향교·서원: 남포향교, 보령향교, 오천향교, 화암서원

-전통사찰: 금강암, 백운사, 선림사, 중대암, 윤창암

○ 내   용

- 코로나19 관련 전통사찰 및 향교·서원 방역

- 출입자 명부작성, 발열체크, 근무자 마스크 상시 착용

- 자체방역 추진 (1일 1회 이상)

- 손소독제 및 발열체크기 상시 구비

- 의심증상자 등 상황발생시 신속히 보건소 등 관련기관 신고 독려

코로나19 각종 시설 사용료(공유재산 대부료 포함)

감면 현황 및 감면 기준

- 해당없음

코로나19로 인한 각종 행사 취소 현황

연번	부서명	축 제 명	기 간	장 소	주요내용	비 고
계	관광과	9개
1	관광과	대천해수욕장 조개구이축제	5월중 (3일간)	대천해수욕장일원	조개잡이체험 등
2	관광과	보령AMC모터 페스티벌	5월중 (2일간)	대천해수욕장일원	차량전시, 대회 및 체험행사 등
3	관광과	원산도오봉산 해수욕장 개장식	2020. 6. 1. ~ 8. 31. (기간 중 하루)	원산도 오봉산 해수욕장	·내빈초청 ·노래자랑 · 이벤트 실시
4	관광과	무창포 해변예술제	2020. 8. 1.	무창포 해수욕장	·시민화합행사 ·해변예술제 ·바다체험
5	관광과	원산도 한여름밤의 7080 해변콘서트	2020. 8. 1. ~ 8. 31. (기간 중 하루)	원산도 오봉산 해수욕장	·해변콘서트 ·노래자랑 ·개막식공연
6	관광과	제22회 무창포 신비의바닷길 축제	9.18.~9.20. (3일간)	무창포해수 욕장일원	신비의바닷길 체험행사 등
7	관광과	김좌진장군 추모제향	10. 22(1일)	김좌진장군묘소	추모제향
8	관광과	남포벼루 호남 특 별 전	10월중	전북 전주 한옥마을(예정)	작품전시회 등
9	관광과	외연도 풍어당제	3. 09(1일)	외연도	풍어제,산신제 거행

코로나19 관련 집단 및 다중이용시설 등 관리현황

	시 설	개소 수	관리 내용	점검 결과
	5건	83개소
1	관광숙박업	5	코로나 방역지침 준수 여부 점검	양호
2	관광펜션업	45	코로나 방역지침 준수 여부 점검	양호
3	야영장업	19	코로나 방역지침 준수 여부 점검	양호
4	유원시설업	12	코로나 방역지침 준수 여부 점검	양호
5	관광유람선업	1	코로나 방역지침 준수 여부 점검	양호 (10월부터 휴업중)

소  관  분  야

도심지 관광홍보판 관리용역 현황

- 해당없음

□ 내포문화권 문화유적 정비사업 현황

1. 충청수영성 복원사업

◇ 사적 제501호로 지정된 국가지정문화재인 충청수영성의

복원 등 정비 사업을 통해 관광자원화 추진

▢ 사업개요

○ 사업기간: 2009 ~ 2025년

○ 총사업비: 40,000백만 원(국비 28,000, 도비 6,000, 시비 6,000)

○ 사업내용: 시설 복원, 편의시설 설치, 조경 등

○ 연차별 투자계획                                   (단위: 백만 원)

구분	총 사업비	기 투자액	’17년 (보수정비 사업비)	‘18년 (보수정비 사업비)	‘19년 (보수정비 사업비)	‘20년 (보수정비 사업비)	‘21년 이후
계	38,000	10,971	900	510	70	70	25,479
국비	26,601	7681	630	357	49	49	17,835
도비	5,699.5	1645	135	76.5	10.5	10.5	3,822
시․군비	5,699.5	1645	135	76.5	10.5	10.5	3,822

▢ 그간추진 상황

○ 2005 ~ 2008: 문화재구역 토지매입, 객사(진휼청) 건물 보수

○ 2009 ~ 2011: 지장물 매입 철거 및 영보정터 발굴조사, 성곽정비

○ 2012년: 토지매입 및 지장물 철거, 문화재 안내판 정비(1,200백만 원)

○ 2013년: 충청수영성 진입로 정비, 중심구역 잡목 제거(1,000백만원)

○ 2014년: 영보정 복원 착공, 탐방로 정비 착공, 토지매입(1,000백만 원)

○ 2015년: 영보정 복원, 장교청 정비, 탐방로 설치, 토지매입, 발굴조사(2,038백만 원)

○ 2016년: 영보정 단청 및 주변정비, 시・발굴조사, 현상변경

허용기준 재작성, 성벽 및 동문루 기본계획 수립(2,590백만 원)

○ 2017년: 잡목정비 사업, 치성 및 성벽, 남문지 발굴조사(900백만 원)

○ 2018년: 충청수영성 탐방로 조성 및 경관조명 설치 (510백만 원)

○ 2019년: 충청수영성 탐방로 조성 실시설계(50백만 원)

▢ 이후계획

○ 2021년: 충청수영 해상공원 및 판옥선 조성 추진(21~24년)
충청수영성 축소 모형복원 용역 추진(21~23년)

2. 성주사지 정비사업

◇ 사적 제307호로 지정된 국가지정문화재인 보령 성주사지의       지속적 정비를 통한 소중한 문화유산 보존

▢ 사업개요

○ 사업기간: 2009 ~ 2020년

○ 총사업비: 8,000백만 원(국비 5,600, 도비 1,200, 시비 1,200)

○ 사업내용: 성주사지 정비 1식

○ 연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비	기 투자액	’17년	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년 이후
계	10500	5060	50	86	45	30	5,229
국비	7,381.2	3598	35	53.2	14	21	3,660
도비	1,557.9	730	7.5	16.4	15.5	4.5	784
시․군비	1,559.9	732	7.5	16.4	15.5	4.5	784

▢ 그간 추진 상황

○ 2009~2011.: 광장 정비, 발굴조사, 중심사역 유적 정비(2,000백만 원)

○ 2013년: 주변경과 정비, 낭혜화상탑비 방재시설(100백만 원)

○ 2014년: 발굴조사, 낭혜화상탑비 보호각 단청, 중앙 삼층석탑

해체보수, 서 삼층석탑 보존처리(720백만 원)

○ 2015년: 토지매입, 보물 정밀실측, 성주사지 정비계획 수립(470백만 원)

○ 2016년: 성주사지 중심사역 정비(320백만 원)

○ 2017년: 국보 제8호 낭혜화상탑비 정밀실측(50백만 원)

○ 2018년: 성주사지 오층석탑 정밀안전진단 실시(50백만 원)

○ 2019년: 성주사지 동삼층석탑 보존처리(25백만 원)

○ 2020년: 성주사지 오층석탑 모니터링 및 보존처리(70백만 원)

▢ 이후계획

○ 2021년: 성주사지 홍보관 개관(70억 원) 및 낭혜화상탑비 보수 등                문화재 보수정비(180백만 원)

3. 남포읍성 정비

◇ 도 기념물 제10호로 지정된 보령 남포읍성의 지속적 정비를 통한 소중한 문화유산 보존

▢ 사업개요

○ 사업기간: 2012 ~ 2030(19년간)

○ 총사업비: 15,000백만원(도비 7,500 시비 7,500)

○ 사업내용: 남포읍성 정비 1식

○ 연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비	기 투자액	’17년	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년 이후
계	10500	5060	50	86	45	30	5,229
국비	7,381.2	3598	35	53.2	14	21	3,660
도비	1,557.9	730	7.5	16.4	15.5	4.5	784
시․군비	1,559.9	732	7.5	16.4	15.5	4.5	784

▢ 그간 추진 상황

○ 2015년: 잡목정비 사업(22백만 원)

○ 2017년: 성벽 정비 및 토지매입(250백만 원)

○ 2018년: 성벽 및 탐방로 정비, 토지매입(530백만 원)

○ 2019년: 성벽 시발굴조사 및 토지매입(394백만 원)

○ 2020년: 성벽 시발굴조사 및 성벽 정비(1,560백만 원)

▢ 이후계획

○ 2021년: 성벽 시발굴조사(계속) 및 성벽 정비(1,571백만 원)

문화유적 발굴 추진현황

연도	발굴구역	조사면적(㎡)	조사기관	발굴기간	비고
계	4건
2019	남포읍성 서남치성 및 남문지 시굴조사	2,460	재)동방문화재연구원	2019. 4. 29. ~ 2019. 5. 7.	시굴
2019	남포읍성 서남치성 발굴조사	500	재)한얼문화유산연구원	2019. 11. 6. ~ 2020. 1. 4.	발굴
2020	남포읍성 남벽 및 동문지, 서문지 시굴조사	6,200	재)누리고고학연구소	2020. 3. 2. ~ 2020. 7. 31.	시굴
2020	남포읍성 남벽 및 남문지, 동문지, 서문지 정밀발굴조사	5,950	재)누리고고학연구소	2020. 9. 17. ~ 진행중	발굴

※ 발굴조사 성과를 토대로 남포읍성 정비사업의 학술적 토대로 이용함.

▢ 발굴유적 보존 및 관리 현황

발굴유적	발굴내용	보존 및 관리 현황	비고
보령 성주사지	<1~11차 발굴조사> 고려~조선시대 사찰 건물지 확인 토기, 자기, 기와 등 발굴	발굴 현장 보존 중 (출토 유물 박물관 귀속)
보령 충청수영성	<성벽 발굴조사> 동벽, 남벽, 동문지, 남문지 등 일부 지역 발굴 조사 석축 축조방법 확인, 문지 구조 일부 확인 <내아영역 발굴조사> 영보정, 내아영역 발굴 조선시대 내아 건물지 확인	발굴 현장 보존 중 (출토 유물 정리작업 중)

성주산 남포오석 테마거리 조성사업 추진현황

▢ 사업개요

○ 사업기간: 2016 ~ 2020년

○ 총사업비: 9,000백만 원(국비 4,500 /시비 4,500)

→ 2020년 지방이양사업 전환

○ 사업내용

- 2016년도: 실시설계 용역

- 2017년도: 바람재 멀티광장, 팔각정 전망대 정비, 돌탑 휴게

쉼터 조성, 전기공사, 데크로드 정비 등

- 2018년도: 편백나무 힐링숲 조성, 바람재~팔각정 데크로드 조성, 오석 작품석 구입, 경관조명 등

- 2019년도: 낙조전망대 설치, 공사 착공

- 2020년도: 옥마폭포 조성, 주차장 및 진입도로 조성

○ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분		계	2016	2017	2018	2019	2020
합 계		9,000	150	3,120	2,500	1,600	1,630
국 비		4,500	75	1,560	1,250	800	-
지방비	소 계	4,500	75	1,560	1,250	800	1,630
	도 비	-	-	-	-	-	815
	시 비	4,500	75	1,560	1,250	800	815

▢ 그간추진상황

○ 2014.  8.: 성주산 남포오석 테마거리 조성계획(안) 수립

○ 2014. 10. 13 ~ 12. 11: 성주산 남포오석 테마거리 조성사업 타당성조사 용역

○ 2015.  7. 27.: 2015년 제3차 지방재정 투자사업 중앙심사

○ 2015. 10. 27.: 2015년 제4차 지방재정 투자사업 도심사

○ 2017.  2.  2.: 실시설계용역 준공

○ 2017.  5. 22.: 1차년도 공사착공(2017년도분)

○ 2018.  3.  5.: 2차년도 공사착공(2018년도분)

○ 2018.  5. 16.: 1차년도 공사준공(2017년도분)

○ 2019.  4.  4.: 3차년도 실시설계용역 착수

○ 2019.  5.  8.: 2차년도 사업준공(2018년도분)

○ 2019. 10. 31.: 3차년도 실시설계용역 준공

○ 2019. 11. 27.: 3차년도 공사 착공(2019년도분-낙조전망대)

○ 2020. 10. 13.: 4차년도 공사 착공(2020년도분-옥마폭포)

▢ 이후계획

○ 2020. 11.: 3차년도 공사 준공(2019년도분-낙조전망대)

○ 2020. 12.: 4차년도 공사 준공(2020년도분-옥마폭포)

○ 2021.  2.: 4차년도 공사 발주(2020년도분-주차장 및 진입도로)

○ 2021. 12.: 4차년도 공사 준공(2020년도분-주차장 및 진입도로)

▢ 종합계획도

보령시 관광객 현황 및 유치실적(2018~2020)

관광지별	연도
	2018년	2019년	2020년(1~9월)
계	19,302,256	17,651,141	10,006,568
대천해수욕장 (머드축제기간포함)	17,031,875	15,427,169	8,660,600
무창포 해수욕장	699,000	661,500	740,170
독산 해수욕장	30,320	54,058	44,890
개화예술공원	278,631	317,458	147,596
보령석탄박물관	65,055	92,469	36,353
웨스토피아	194,546	83,528	38,040
오천면 부속도서	127,084	112,746	55,874
성주산 휴양림	157,942	168,312	42,471
오서산 자연휴양림	115,949	96,554	24,465
짚트랙 코리아	151,079	176,832	17,840
성주사지	17,500	21,600	14,400
문화의 전당	46,074	132,408	8,678
용두 해수욕장	18,547	13,510	4,905
스카이바이크	114,106	121,749	50,898
보령머드 박물관	88,289	81,880	28,095
냉풍욕장(계절관광지)	166,259	89,368	-

▢ 관광객 현황

▢ 관광객 유치실적

(단위: 명)

구 분	2017	2018	2020
계	10,173	10,678	333
내국인 관광객 유치	5,248	5,026	148
외국인 관광객 유치	4,925	5,652	185

※ 코로나19로 인한 단체 관광객 사업 중단(2020. 2. 28. ~ 10. 18.)

□ 성주산 내륙관광 개발계획 및 추진현황

▢ 사업개요

○ 위    치: 보령시 성주면 성주리 산24-20번지 일원

○ 사업내용: 체험형 관광레포츠시설 조성 1식

- 곡선형 짚와이어, 포레스트슬라이드, 포레스트 어드벤처, 네트어드벤처, 모노레일 등

○ 사업기간: 2020 ~ 2022년

○ 총사업비: 16,400백만 원(도비 8,200 /시비 8,200)

○ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분		계	2020	2021	2022
합 계		16,400	1,000	7,700	7,700
국 비		-	-	-	-
지방비	소 계	16,400	1,000	7,700	7,700
	도 비	8,200	500	3,850	3,850
	시 비	8,200	500	3,850	3,850

▢ 그간추진상황

○ 2018. 11. 5.~2019. 6. 21.: 성주산 내륙산악관광자원개발 타당성조사 용역

○ 2019.  6. 12.: 2019년 정기 제2차 충남도 지방재정투자심사 완료

○ 2020.  1.  8.: 도유림↔시유림 토지교환 완료

○ 2020.  4. 17.: 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2020.  9.  4.: 기본 및 실시설계용역 중간보고회

○ 2020.  9. 16.: 산림레포츠 조성 인․허가 관련 사전협의(도 산림자원과)

▢ 이후계획

○ 2021.  3.: 내륙산악관광 산림레포츠 조성 인․허가

○ 2021.  5.: 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2021.  6.: 사업발주

○ 2022.  12.: 준공예정

□ 위치도

□ 조 감 도