등록번호			주무관
등록일자
결재일자
			협조
공개구분	부분공개(5)

= 웅천읍 주민쉼터 진출입로 =

도시계획시설 단계별 집행계획 수립 계획

	보 령 시 (도시재생과)

= 웅천읍 주민쉼터 진출입로 =

도시계획시설 단계별 집행계획 수립 계획

❍「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조에 따라 결정된 도시계획시설(웅천읍 소로 2-69호)에 대하여

❍ 같은법 제85조에 따라 단계별 집행계획을 수립하고, 의회의견 청취절차를 거쳐 공고하고자 함.

Ⅰ		단계별 집행계획 수립 근거

□  시장은「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제85조제1항에 따라 도시계획시설 결정·고시일부터 3개월 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 재원조달계획, 보상계획 등을 포함하는 단계별 집행계획을 수립하여야 하며,

□  같은법 시행령 제95조에 따라 도시계획시설의 단계별 집행계획을 수립하고자 하는 때에는 지방의회의 의견을 들어야 함.

Ⅱ		단계별 집행계획(안)

가. 도시계획시설(도로) 결정조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	소로	2	69	8	특수 도로	74	중로2-10	대창리 428-8	보행자 전용도로	-	22.10.31.	-

나. 사업 개요

도시계획 시설명	사업명	사업시행자	사업기간	사업규모	사업비 (백만원)	비고
소로 2-69	웅천읍 주민쉼터 진출입로 개설	보령시장 (도로과)	2022년 ~ 2023년	보행자 전용도로 L=74m, B=8m	785	-

다. 재원별 투자계획                                             (단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기 시행	1단계			2단계			비고
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
시 비	785 (100%)	565 (72%)	70 (9%)	150 (19%)

※ 2021년도 재원까지 기 시행

라. 용도별 투자계획                                             (단위 : 백만원)

공 종 별	총 사업비		기 시 행		2022		2023		2024		이후 계획
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
계		785		565		70		150
부지매입(㎡)	645	635	462	565	183	70	-	-	-	-	-	-
도로 개설(m)	74	150	-	-	-	-	74	150	-	-	-	-

Ⅲ		추진경위 및 이후 계획

❍ 2022.08.02. ~ 2022. 08. 30. : 관련기관(부서) 협의 및 주민열람 공고

❍ 2020.10.05.: 보령시 도시계획위원회 심의

❍ 2020.10.31.: 도시관리계획 결정(변경) 고시

❍ 2022.11.   : 시의회 의견 청취

❍ 2022.12.   : 도시계획시설 단계별 집행계획 공고(도시재생과)

❍ 2023. 1.   : 사업시행(도로과)

붙임 1. 의회 의견청취 요청(안) 1부.

2. 단계별 집행계획 공고문(안) 1부.  끝.